29. 목포시의료원 감염병 대비 음압병동 증설

	【 취지 및 목표 】
❖ 전남 서남권 감염병 전담병원인 목포시의료원은 코로나 환자 급증시 일반병동을 감염병 병동으로 전환하여 이동형 음압기로 매우 열악한 환경 속에서 감염병을 대응해 왔으나, 위중증 환자를 위한 음압병동을 증설하여 공공의료 역량 강화 및 감염병 대응체계 구축

사업기간	임기내 완료 ☑ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ☑ 비예산사업 □	사업비	국비 ☑ 도비 ☑ 시비 ☑ 민자 ☑
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ☑	추진주체	국 가 ☑ 지 자 체 ☑	총사업비	-

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(연차사업)

□ 위    치 : 목포시의료원 본관(정문) 좌측면(별동 증축)

□ 규    모 : 면적 867㎡

□ 사업내용 : 음압시설병동 30병상(1인실 2개, 4인실 7개)

※코로나 대응 현황 : 이동형음압기 22개, 최대 160병상까지 운영

□ 사 업 비 : 감염병 대응 기능특성화 지원사업비(98억원) 연계 추진

□ 전남권 의료원 음압병동 운영 현황

(기준: 22. 9월)

목포	순천			강진
음압병상	계	음압병상	추가증설	계	음압병상	추가증설
0	11	4	7	7	4	3

※목포시의료원 감염병 운영병상 : 이동형음압기 2개(3인실 1개, 4인실 1개)

□ 추진계획

□‘21~‘22년 보건복지부 기능특성화사업과 연계 추진

- 호흡기 및 긴급치료병상(음압병상) 30병상 지원 확정 : ’22. 3.

□ 긴급치료병상 증축공사 기본 및 실시설계 공모       :‘22. 9.~12.

□ 긴급치료병상 증축공사 기본 및 실시설계            :‘23. 1.~3.

□ 기본설계 심의 및 계약심사 등 행정절차 이행        :‘23. 3.~4.

□ 긴급치료병상 증축공사 착공 및 준공, 사업완료 보고  :‘23. 5.~12

□ 연차별 추진 목표(계획)

연도별	추진 사항		달성도(%)
2022	연도별 목표	긴급치료병상 설계 완료	30%
	추진계획	설계공모, 설계용역 완료
2023	연도별 목표	긴급치료병상 준공	100%
	추진계획	시공사 선정, 착공 및 준공

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황						2026년 이후
			소계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계
	국비		해	당	없	음
	도비
	시비
	자비

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	박호빈 (2022.6.10 ~ 6.30.)	최인옥 (2022.6.10 ~ 6.30.)	이명희 (2022.6.10 ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	박호빈 (2022.7.5 ~ 7.29.)	최인옥 (2022.7.5 ~ 7.29.)	유선경 (2022.7.5 ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	박호빈 (2022.8.1 ~ 9.16)	최인옥 (2022.8.1 ~ 9.16)	유선경 (2022.8.1 ~ 9.16)

담당부서		보건위생과장 박호빈 건강증진팀장 최인옥 주무관 유선경