37. 목포시 공영주차장 건립

	【 취지 및 목표 】
		응
❖ 청사 주변 공영주차장 건립으로 방문민원인 주차불편 민원해소 ❖ 시청주변 불법주차 근절해소 등 인근 주민에게 주차편의 제공

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	5,000 백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023 ~ 2024

□ 위    치 : 용당동 1206-1 외 1필지

□ 사 업 량 : 부지 3,500㎡, 주차장 2층(3단) 연면적 5,000㎡(주차 364대⇒564대)

- 기존 주차장 : 364면(본관동 2대, 민원동 77, 의회동 62, 야외 223) *야외 200대증

□ 사업내용 : 시청사 야외주차장에 공용주차장 건립

□ 사 업 비 : 총 5,000백만원(국비 2,500 시비 2,500)

□ 추진경과

❍ `22.  6 : ‘23년 전라남도 균특 전환사업 신청(주차환경개선사업)

❍ `22.  9 : 야외주차장 소유권 취득(도유지 교환완료)

□ 추진계획

□ `22. 10. ~ 11 : ’23년 본예산 확보

□ `23. 2.  ~  8 : 목포시 공용주차장 건립 기본 및 실시설계 추진

□ `23. 9.       : 목포시 공용주차장 건립공사 추진

□ `24. 4.       : 목포시 공용주차장 건립공사 준공

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	국가균특(주차환경 개선사업)사업 신규사업 확정 및 사업비확보	30%
2023	실시설계 추진 및 주차빌딩 공사착수	30%
2024	공사추진 및 준공	40%
2025
2026

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		5,000			2,500	2,500
청사 주차 빌딩 건설	국비	2,500			1,250	1,250
	도비
	시비	2,500			1,250	1,250
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	오형순 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김진명 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김덕철 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	구 준 (2022.7.5. ~ 7.29.)	박철우 (2022.7.5. ~ 7.29.)	이제만 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	구 준 (2022.8.1. ~ 9.16.)	박철우 (2022.8.1. ~ 9.16.)	이제만 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		회계과장 구 준 청사관리팀장 박철우 주무관 이제만