43. 목포 스마트그린 산업단지 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 산업 밸류체인 디지털화, 저탄소·고효율 에너지혁신, 친환경화를 통한 산업·공간·사람 중심의 산단 조성 ❖ 스마트그린산단 조성을 통해 AI 기반 첨단 혁신 기업 유치로 지역경제 활성화 및 청년 일자리 창출

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 █	예산여부	예산 사업 █ 비예산사업 □	사업비	국비 █ 도비 □ 시비 █ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 █	추진주체	국 가 □ 지 자 체 █	총사업비	백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022년 ~ 2028년

□ 위    치 : 사전조사용역을 통해 후보지 결정

□ 사 업 량 : 조성면적 약 20만평 이하

□ 사 업 비 : 후보지 결정 후 산출

□ 개발방식 : 자체, 특수목적법인(SPC) 등

□ 추진계획

❍ ‘22. 10. ~ ‘23. 03. : 사전타당성조사 용역 추진

❍ ‘23. 04. ~ ‘23. 05. : 산업단지지정계획 신청 및 승인(국토부)·고시(전남도)

❍ ‘23. 05. ~ ‘23. 12. : 예비타당성조사

❍ ‘23. 12. ~ ‘24. 12. : 단지계획(기본·개발·실시계획 및 기본·실시설계) 용역 추진

❍ ‘23. 12. ~ ‘24. 12. : 환경/교통/재해 영향평가, 문화재 지표조사,

에너지 사용계획 등 법적 의무평가 용역 추진

❍ ‘24. 12. ~ ‘25. 03. : 보상추진

❍ ‘24. 12. ~ ‘25. 03. : 산단계획승인 신청 및 승인고시(전남도)

❍ ‘25. 03. ~  ‘28. : 공사착공 및 준공

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	- 사전타당성조사용역 발주	5
2023	- 산업단지지정계획 승인, 예비타당성조사 완료	15
2024	- 단지계획 용역 완료	25
2025	- 산업단지 계획, 승인산업단지 조성 공사 공정률 10%	40
2026	- 산업단지 조성 공사 공정률 40%	50

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계
목포 스마트그린 사업단지 조성	국비
	도비
	시비
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	김태곤 (2022.6.10. ~ 6.30.)	고진찬 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김은향 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	김태곤 (2022.7.5. ~ 7.29.)	권용선 (2022.7.5. ~ 7.29.)	박대건 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	김태곤 (2022.8.1. ~ 9.16.)	권용선 (2022.8.1. ~ 9.16.)	박대건 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		기업유치과장 김태곤 산단조성팀장 권용선 주무관 박대건