54. 해상풍력 배후단지 및 지원부두 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 전남형 상생일자리 사업 등으로 추진중인 대규모 해상풍력발전단지의 원활한 조성을 위한 지원인프라 구축을 통한 전진기지 구축 ❖ 목포 신항 내 2단계 배후단지 및 해상풍력 전용부두 조성(예타사업) 및 특구지정 추진

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 ■	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 ■ 지 자 체 □	총사업비	150,900백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2026

□ 위    치 : 목포 신항일원

□ 사 업 량 : 철재부두 1선석(3만톤급) 구축, 2단계 배후단지(238,000m2) 조성

□ 사업내용 : 해상풍력 전진기지 구축을 위한 지원인프라 조성

□ 사 업 비 : 총 150,900백만원(국비)  * 예타 추진과정에서 변경 가능

□ 추진계획

□ 2단계 배후단지 및 지원부두 조성을 위한 예비타당성 조사 사업 추진

- 철재물동량 확보, 관련기업 유치 등 타당성 보완 및 근거 추가 마련

- 해수부 용역(광양항 스마트항만 조성) 결과 검토 후, 제2자동차 부두와 연계하여 예타 신청하는 방안 고려

* 타당성 확보를 위한 용역(도 주관), 컨설팅, 관계부처 설득 등 전방위적 노력 필요

□ 목포 신항(1, 2단계 배후단지 및 전용항만) 해상풍력 특구 지정

- 해상풍력 산업 관련 부가가치 창출 기반이 집적화된 핵심 허브로써의 역할 수행을 위한 ‘해상풍력 특화구역’ 지정 노력

* 예타사업 및 1단계 배후부지 내 제조기업 유치 등 추진현황 고려하여 신청

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	- 배후단지 및 지원부두 조성 타당성 보완 협의	30
2023	- 신항 인프라 조성(예타) 설계비 반영(24년) 예비타당성 조사 대상사업 신청	40
2024	- 지원부두 및 배후단지 조성 기본설계	60
2025	- 지원부두 및 배후단지 조성 착공 - 신항 해상풍력 지원인프라 특화구역 지정 신청	80
2026	- 지원부두 및 배후단지 조성 공사 준공 - 해상풍력 관련 기업 활동 안정화 지원	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		150,900	150,900	-	-	3,000	55,000	92,900
해상풍력 배후단지 및 지원부두 조성	국비	150,900	150,900	-	-	3,000	55,000	92,900
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	나 재 형 (2022.6.10. ~ 6.30.)	이 상 학 (2022.6.10. ~ 6.30.)	정 재 원 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	차 명 신 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김 진 명 (2022.7.5. ~ 7.29.)	정 재 원 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	차 명 신 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김 진 명 (2022.8.1. ~ 9.16.)	정 재 원 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		지역경제과장 차명신 신산업팀장 김진명 주무관 정재원