55. 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축

	【 취지 및 목표 】
❖ 전세계적인 기후위기 극복 노력 및 2050 탄소중립 실현에 대응하기 위해 지역의 강점을 살린 재생에너지 산업 활성화 ❖ 대규모 해상풍력단지 효율적 조성을 위한 연구개발, 물류 플랫폼 구축, 통합모니터링 등 해상풍력산업 활성화 및 기업지원 체계 마련

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 시비 ■ 민자 ■
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 ■ 지 자 체 ■	총사업비	27,450백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2024

□ 위    치 : 목포 신항 일원

□ 사 업 량 : 해상풍력 플랫폼센터(연면적 약 3,400m2) 건립

□ 사업내용 : 해상풍력산업 활성화, 연구개발 및 기업지원 체계 구축

□ 사 업 비 : 총 27,450백만원

(국비 10,000, 도비 5,630, 시비 11,570, 기타 250)

□ 추진계획

□ (R&D) 해상풍력 유지관리 및 물류관리 플랫폼 개발

- 해상풍력단지 통합관제 모니터링 시스템 및 물류창고 운영 S/W 개발 등

□ (기반구축) 해상풍력 항만물류 인프라 및 통합관제시스템 구축

- 통합지원 센터 및 기자재 물류지원 공공인프라 Warehouse 구축 등

<플랫폼센터 건립 개요>

• 조성위치 : 목포 신항(달동 1330-63)

• 조성규모 : 부지면적 약 5,000m2, 건축 연면적 약 3,400m2(4층)

• 공간구성 : 유지보수실, 기업공동연구실, 통합관제실, 홍보실, 대회의실 등

• 소요예산 : 부지매입 25억원, 설계 5.7억원, 공사 118억원

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	연구개발 완료 및 융복합 플랫폼센터 실시설계	30
2023	플랫폼센터 건축공사 착공(3,400m2, 4층)	50
2024	플랫폼센터 준공 및 항만인프라 구축, 입주기업 모집 및 육성	100
2025	해상풍력 물류인프라 및 통합관제시스템 운영	100
2026	센터 연계 신규사업(연구개발 및 지원인프라) 유치	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		27,450	27,450	6,910	12,354	8,186	0	0
해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축	국비	10,000	10,000	3,500	4,000	2,500	-	-
	도비	5,630	5,630	234	3,217	2,179	-	-
	군비	11,570	11,570	2,926	5,137	3,507	-	-
	기타	250	250	250	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	나 재 형 (2022.6.10. ~ 6.30.)	이 상 학 (2022.6.10. ~ 6.30.)	정 재 원 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	차 명 신 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김 진 명 (2022.7.5. ~ 7.29.)	정 재 원 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	차 명 신 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김 진 명 (2022.8.1. ~ 9.16.)	정 재 원 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		지역경제과장 차명신 신산업팀장 김진명 주무관 정재원