65. 북항권(노을공원) 관광 명소화

	【 취지 및 목표 】
❖ 체험, 감성 등 관광지 조성으로 북항일대 관광객 증가로 주변상권 및 지역경제 활성화 ❖ 해상케이블카 연계 가족단위 체류형 관광명소 조성

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	5,000백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022. ~ 2025.

□ 위    치 : 북항 노을공원

□ 사 업 량 : 노을공원 공중 보행로 조성(100m×5m×9m)

□ 사업내용 : 공중 보행로 야간경관, 보행교 아트, 포토존 등

□ 사 업 비 : 총 5,000백만원(균특 2,500, 시비 2,500)

□ 추진계획

□ 예산확보 및 기본용역 발주              : 2022. 12. ~

□ 노을공원 공중 보행로 추진              : 2024.  1.

□ 노을공원 공중 보행로 사업 완료         : 2025. 12.

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2023	설계용역 추진 : 노을공원 공중보행로 등 기본설계 및 실시설계	40
2024	공사추진 : 노을공원 공중보행로 조성사업 추진	60
2025	공사추진 : 노을공원 공중보행로 조성사업 준공	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		5,000	5,000	500	200	2,000	2,300
노을공원 공중보행로 조성	국비
	도비	2,500	2,500	250	100	1,000	1,150
	시비	2,500	2,500	250	100	1,000	1,150
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	정지숙 (2022. 6. 10. ~ 6. 30.)	김만재 (2022. 6. 10. ~ 6. 30.)	김승규 (2022. 6. 10. ~ 6. 30.)
실천계획(1차) 보고	박태윤 (2022. 7. 5. ~ 7. 29.)	김만재 (2022. 7. 5. ~ 7. 29.)	김덕철 (2022. 7. 5. ~ 7. 29.)
실천계획(2차) 보고	박태윤 (2022. 8. 1. ~ 9. 16.)	김만재 (2022. 8. 1. ~ 9. 16.)	김승만 (2022. 8. 1. ~ 9. 16.)

담당부서		관광과장 박태윤 관광사업팀장 김만재 주무관 김승만