68. 남항 재개발사업 추진

	【 취지 및 목표 】
❖ 서남권 관광거점 해양도시로서의 위상에 걸맞는 컨밴션센터 건립 및 마리나 관련 시설 조성으로 국제행사 개최와 지역경제 활성화 도모 ❖ 유휴공간 재개발을 통한 목포의 새로운 랜드마크 조성 및 친수공간으로 재탄생시켜 시민 삶의 질 향상 도모

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 ■	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 □ 시비 □ 민자 ■
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 ■ 지 자 체 □	총사업비	1,480억원 (국비480 민자 1,000)

□ 추진배경 및 필요성

□ 서남권 대표 해양관광 거점단지 조성으로 도시브랜드 가치 제고

□ 유휴부지인 남항을 민․관 협력으로 개발 공공성 확보

□ 시민과 관광객 대표 힐링 공간인 삼학도 공원과 남항을 연결하여 원도심지역 활력 제고

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2030(8년)

□ 위    치 : 남항 일원

□ 사 업 량 : 410,258㎡(공유수면 30,000㎡ / 380,258㎡)

□ 사업내용 : 공유수면 매립, 컨벤션센터, 해양레저 시설 등

□ 사 업 비 : 약 1,480억원 예상(국비480 / 민자1,000)

□ 그동안 추진상황

□ 민간제안서 접수(민간제안자→해수부) : '17. 5. 22.

□ “전남 요트시티 조성사업” 제안 [(사)전남대불산학융합원→ 전라남도)] : '17. 7. 5.

□ 전남 요트시티 + 항만재개발 민간제안 관계기관 협의  : '17. 7. ~ '18. 8.

- 남항은 우리시에서 유일하게 개발이 가능한 토지로써 목포 발전을 위하여 장기적인 안목을 가지고 목포시 중장기 발전계획과 연계, 해수부와 협의 개발(시 최종의견)

□ 목포 남항 항만재개발사업 추진 계획 결정(해수부) : '18.  9. 4.

□ 목포시 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 : '19. 12. ~ '20. 6.

□ 제3차 항만재개발 기본계획 고시 :  '20. 12.

□ 남항 투기장 환경개선사업 추진 중(해수부) : '21.~ '24.

□ 추진계획

【1부지】

□ 1단계 : 민간투자자 발굴 및 해수부 협의

□ 2단계 : 사업제안(15개월 소요)

□ 3단계 : 사업계획 및 실시계획 수립(18개월 소요)

□ 4단계 : 부지공사(42개월 소요)

□ 5단계 : 개별 건축물 설계/시공

【2부지】

□ 남항~삼학도 수제선 정비 타당성 검토 용역 추진 : '22. 10.

□ 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 : '23.

□ 남항~삼학도 공유수면 매립 공사 착공 : '25. ~

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진 목표		달성도(%)
2022~2023	연도별 목표	【1부지】사업제안사항 검토 및 우리시 의견 반영 【2부지】제4차 항만기본계획 수정계획 반영	10
	추진계획	【1부지】민간사업자 지속 발굴 및 협의 【2부지】타당성 검토 용역 추진
2024~2025	연도별 목표	【1부지】항만재개발 사업계획 및 실시계획 수립 【2부지】공유수면 매립 및 수제선 정비	20
	추진계획	【1부지】사업인허가 행정절차 진행 【2부지】매립 공사 착공
2026~2028	연도별 목표	【1부지】부지공사(연약지반공사 등) 【2부지】공사 지속 추진	50
	추진계획	【1부지】민간사업자 신속 추진 독려 【2부지】매립 공사 준공
2029~	연도별 목표	【1부지】컨벤션센터, 놀이동산 등 조성	100
	추진계획	【1부지】민간자본 투입 사업 본격 추진

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 억원)

사업명	구분	충사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계	민간	1,480	1,480				350	1,130
남항재개발	국비	480	480				50	430
	도비
	군비
	민간	1,000	1,000				300	700

공약관리 실명제
구분	과장	담당
사전검토 보고	조영매 (2022.6.10. ~ 6.30.)	나철주 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	조영매 (2022.7.5. ~ 7.29.)	이지영 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	조영매 (2022.8.1. ~ 9.26.)	이지영 (2022.8.1. ~ 9.26.)

담당부서		해양항만과장 조영매 항만정책팀장 이지영