69. 수협위판장 활용 복합문화공간 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 수협이전에 따른 내항 공동화를 예방하고 지역상권 회복을 위해 친수공원 및 해양문화관광 단지를 조성하여 시민의 삶의 질 향상과 인근 관광지와 연계한 관광수요 창출

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 ■	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 ■
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	400억원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2026

□ 위    치 : (구)목포수협 위판장

□ 사 업 량 : 27,381㎡

□ 사업내용 : 수변공원 및 친수공간 조성, 관광상업시설 등

□ 사 업 비 : 약400억원 예상(전액 민간자본)

□ 추진계획

□ 1단계 : (구)수협부지 친수공간 조성 방안 기본구상 용역 추진-’23. 1

- 주민 친화적인 공간 구성 방안 마련(수변공원 및 친수공관 조성, 관광상업시설 등)

□ 2단계 : 목포시 종합계획 수립 - ‘23. 7. ~ ’24. 6.

- 관광거점도시, 문화도시, 도시재생, 해변맛길 30리 등 우리시 주요시책과 접목 및 연계사업 등 검토

- 목포해수청·목포수협 부지사용 및 토지매입 등 행정절차 협의

□ 3단계 : 민간사업자 모집 -‘24. 7. ~ ’25. 6.

□ 4단계 : 부지 및 건축물 매입 - ‘25. 7. ~ ’26. 1.

□ 5단계 : 수협이전부지 리모델링 본격 추진 - ‘26. 7. ~

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2023	(구)수협부지 친수공간 조성 방안 기본구상 용역 추진	10
2023 ~ 2024	목포시 종합계획 수립 (우리 시 주요시책과 접목 및 연계사업 검토 / 토지매입, 부지사용허가 등 행정절차 진행)	20
2024 ~ 2025	민간사업자 모집(최적의 민간사업자 발굴)	50
2025 ~ 2026	부지 및 건축물 매입	60
2026 ~	수협이전부지 리모델링 본격 추진	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 억원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		400.3	250.3		0.3		250	150
수협위판장 활용 복합문화공간 조성	국비
	도비
	시비	0.3	0.3		0.3
	기타	400	250				250	150

공약관리 실명제
구분	과장	담당
사전검토 보고	조영매 (2022.6.10. ~ 6.30.)	나철주 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	조영매 (2022.7.5. ~ 7.29.)	이지영 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	조영매 (2022.8.1. ~ 9.26.)	이지영 (2022.8.1. ~ 9.26.)

담당부서		해양항만과장 조영매 항만정책팀장 이지영