80. 이훈동 정원 관광 명소화

	【 취지 및 목표 】
❖ 대한민국을 대표하는 근대역사문화 자산인 이훈동정원은 1930년대 조성된 일본식 정원으로 전남도 문화재 지정 등 역사적 가치가 높은 정원임 ❖ 유달동 근대역사문화 거리에 관광객이 많아지고 있는 현실과 연계하여 이훈동 정원을 개방함으로써 목포권 관광활성화를 도모하고 국내와 해외여행객들에게 사랑받는 세계적인 정원 명소화 추진

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 ■	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	220백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023 ~ 2026

□ 위치규모 : 목포시 유동로 63(유달동) / 정원면적 5,280㎡(건물포함)

□ 정원구성 : 입구정원, 안뜰정원, 수풀과 샘이 있는 임천정원, 후원

□ 사업내용 : 이훈동 정원 수목 전정작업 지원, 시설물 유지보수 지원

□ 사 업 비 : 220백만원(시비)

□ 과거 정원 개방 및 폐쇄

□ 개방폐쇄 : 2016~2018년 매주 토요일 14~16시 / 폐쇄 2018년 이후

□ 폐쇄사유 : 정원의 수용인원 초과와 방문객 부주의로 인하여 정원(석탑)이 훼손되어 개방 중단

□ 추진계획

□ ‘22. 10. ~      : 정원개방을 위한 관계자 면담

□ ‘23. ~ ’26      : 정원 유지관리 지원, 시설물 보수 등

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	이훈동 정원 관계자 면담 추진, 정원개방 건의	20%
2023	정원수목전정, 시설물 보수, 안내판 설치 등	40%
2024	정원수목전정, 시설물 보수, 안내판 설치 등	60%
2025	정원수목전정, 시설물 보수, 안내판 설치 등	80%
2026	정원수목전정, 시설물 보수, 안내판 설치 등	100%

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		220	220	-	40	60	60	60
이훈동 정원 관광 명소화	국비			-
	도비			-
	시비	220	220	-	40	60	60	60
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	정 지 숙 (2022.6. ~ 6.30.)	박 승 용 (2022.6. ~ 6.30.)	김 정 환 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	오 병 주 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김 영 범 (2022.7.5. ~ 7.29.)	임 성 기 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	오 병 주 (~ 2022.9.20.)	김 영 범 (~ 2022.9.20.)	임 성 기 (~ 2022.9.20.)

담당부서		공원녹지과장 오병주 녹지팀장 김영범 주무관 임 성 기