88. 어구류 보관 및 관리시설 확충

	【 취지 및 목표 】
❖ 북항 배후부지에 어구류 보관시설 등을 조성하여 무질서하게 적재·방치된 어업기자재를 정리하여 해양관광지 이미지 제고하고 어업인 편의 도모

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	4,381백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

□ 위    치 : 목포시 죽교동 691(북항 배후부지 내)

□ 사 업 량 : 부지 37,752㎡, 건축물(철골구조) 1동

□ 사업내용 : 부지 조성, 어구보관창고 및 공동작업장 시설 설치

□ 사 업 비 : 총 4,381백만원(균특전환사업 대상으로 추진 중)

- 도비 160, 시비 4,221백만원(도 지원 한도액 : 개소당 시설비 200백만원 중 80%)

※ 사업대상부지에 대한 해양수산청의 토지 사용 승낙 필요(부지확보 완료 후 균특전환사업 추진 가능)

□ 추진계획

□ 어업인 편익시설 의견수렴 및 현지조사      : ‘22. 8. ~ 9.

□ 사업대상부지 사용협의(목포지방해양수산청) : ‘22. 9. ~ ‘23. 6.

□ 재원확보                               : ‘23. 6. ~ ‘24. 1.

- 자체 지방재정투자심사 의뢰('23. 6.)

- (도비)2024년도 균특회계 전환사업 예산 신청 → 전남도('23. 7.)

- (시비)2024년도 본예산 신청('23. 9.)

□ 설계용역 발주                          : ‘24. 1.

□ 비관리청 항만공사 허가·승인 협의       : ‘24. 6.

□ 공사착공 및 준공                        : ‘24. 10. ~  ‘25. 2.

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	- 어업인 편익시설 의견수렴(시설 구조·위치) 및 현지조사 사업대상부지 사용 협의(해수청)	40
2023	사업대상부지 사용 협의(해수청) - 재원확보 □자체 지방재정투자심사 □균특회계 전환사업 예산 신청(전남도) □기본설계비 및 공사비(시비) 예산 신청	60
2024	기본설계 발주(부지 37,752㎡, 철골구조 건축물 1동) 비관리청 항만공사 허가·승인 협의 - 공사착공 □기초시설(상·하수도) 공사 □부지 지반안정화 공사	80
2025	- 공사착공 □보관시설 건축물(철골구조) 공사 공사준공 □준공검사 및 관리협약 체결	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		4,381	4,381	0	0	4,106	275	0
어구류 보관 및 관리시설 확충	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	160	160	-	-	160	-	-
	시비	4221	4,221	-	-	3,946	275	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	이영예 (2022.6. ~ 7.4.)	김일섭 (2022.6. ~ 6.30.)	김명환 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	김명준 (2022.7.5. ~ 7.31.)	김일섭 (2022.7.1. ~ 7.31.)	(공석) (2022.7.1. ~ 7.31.)
실천계획(2차) 보고	김명준 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김일섭 (2022.8.1. ~ 9.16.)	노유선 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		수산진흥과장 김명준 수산진흥팀장 김일섭 주무관 노유선