90. 어촌뉴딜 300사업 노후 어항 현대화사업 지속 추진

	【 취지 및 목표 】
❖ 관내 낙후된 어항 및 배후어촌의 환경정비를 통한 주민삶의 질과 소득향상에 기여

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	38,000백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2019년~2023년

□ 위    치 : 관내 4개 도서(달리도․외달도, 율도, 고하도)

□ 사 업 량 : 총 3개 어촌뉴딜300사업 (총 35개 단위사업)

- 달리도․외달도 어촌뉴딜 300사업(2019년~2022년 / 15개 단위사업 / 134억원)

- 율도 어촌뉴딜 300사업(2020년~2023년 / 12개 단위사업 / 123억원)

- 고하도 어촌뉴딜 300사업(2021~2023년 / 8개 단위사업 / 123억원)

□ 사업내용 : 낙후 어항 현대화 및 배후 어촌 환경개선 등

□ 사 업 비 : 총 38,000백만원(국비 26,600 도비 3,420 시비 7,980)

□ 추진계획

□ 2019년 달리도․외달도 어촌뉴딜 300사업

- 해양수산부 기본계획 및 마스터플랜 승인(2020년 4월)

- 단위사업 15건 중 달리도항 항만정비 등 6개사업 완료

- 외달도 바다자연정원 조성공사 등 6개 사업 추진 및 완료(2022년 12월)

□ 2020년 율도 어촌뉴딜 300사업(2023년 12월)

- 해양수산부 기본계획 및 마스터플랜 승인(2020년 12월)

- 율도1구 선착장 정비 등 2개 사업 완료

- 오토캠핑장 조성 및 율도8경 조성 등 10개 사업 설계완료(2022년 12월)

- 오토캠핑장 조성 및 율도8경 조성 등 10개 사업 공사완료(2023년 12월)

□ 2021년 고하도 어촌뉴딜 300사업 추진 및 완료(2023년 12월)

- 해양수산부 기본계획 및 마스터플랜 승인(2021년 12월)

- 응박개항, 선착장 환경정비 등 8개 사업 설계완료(2022년 12월)

- 응박개상, 선착장 환경정비 등 8개 사업 공사 추진 및 완료(2023.12월)

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	○ 2019년 달리도·외달도 어촌뉴딜300사업 완료(단위사업 15개) - 외달도 바다자연정원 조성공사 등 6개 사업 추진 및 완료 ※ 달리도항 환경정비 등 9개 사업 기 완료 ○ 2020년 율도 어촌뉴딜300사업 완료(단위사업 15개) - 오토캠핑장(건축) 및 율도8경 조성(토목) 등 10개 사업 실시설계 완료 ※ 율도1구 선착장 정비 등 2개 사업 기 완료 ○ 2021년 고하도 어촌뉴딜300사업(단위사업 8개) - 응박개항, 선착장 환경정비 등 8개사업 실시설계 완료	30%
2023	○ 2020년 율도(외달도) 어촌뉴딜300사업 완료 - 오토캠핑장(건축) 및 율도8경 조성 등 10개사업 공사 추진 및 완료 ○ 2021년 고하도 어촌뉴딜300사업 - 응박개항, 선착장 환경정비 등 8개사업 공사 추진 및 완료	100%

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황						2026년 이후
			소계	~2021년 까지	2022년	2023년	2024년	2025년
계		38,000	38,000	23,614	8,172	6,214
어촌뉴딜300사업(달리도, 율도, 고하도)	국비	26,600	26,600	16,740	6,415	3,445
	도비	3,420	3,420	2,151	825	444
	시비	7,980	7,980	4,723	932	2,325
	기타	-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	해양항만 과장	도서관리 담당	주무관
사전검토 보고	조영매 (2022.6.10. ~ 6.30.)	나창영 (2022.6.10. ~ 6.30.)	강기한 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	조영매 (2022.7.5. ~ 7.29.)	나창영 (2022.7.5. ~ 7.29.)	강기한 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	조영매 (2022.8.1. ~ 9.16.)	나창영 (2022.8.1. ~ 9.16.)	강기한 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		해양항만과장 조영매 도서관리팀장 나창영 주무관 강기한