116. 북항 해수 정화 인입시설 신설

	【 취지 및 목표 】
❖ 현대화된 인입시설 설치로 관광지(북항) 요식업 식품 안전성 확보 ❖ 정화된 청정해수 공급으로 북항 일대 활어 판매 소상공인의 영업환경 개선

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 ■ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	1,500백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022. ~ 2025.

□ 위    치 : 청호로 219번길 인근(항만구역)

□ 사 업 량 : 해수 정화 인입시설 1식

□ 사업내용 : 청정해수 공급시스템 구축

- 해수 인입관로, 여과기, 인입탱크 설치 등

※ 관경 250㎜, 길이 총 500m(해상 200m, 육상 300m)

□ 사 업 비 : 총 1,500백만원(도비 500, 시비 1,000)

□ 추진계획

□ 수혜 대상 상가 선정 등 사전 자료 조사 :‘22. 9.

□ 목포지방해양수산청(도로굴착, 항만시설사용허가 등) 협의 :‘22. 10.

□ 사업계획 확정 :‘22. 12.

□ 청정해수 공급시스템 구축사업 실시설계 용역 :‘23. 6.

□ 공사 착공 및 준공 :‘24. 6. ~‘25. 6.

□ 청정해수 공급시스템을 통한 해수 취수 및 공급 :‘25. 6.~

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	목포해수청 ‘비관리청 항만개발 사업’ 시행 허가 사전협의 및 사업계획 확정	10
2023	청정해수 공급시스템 구축사업 실시설계 용역 시행(6월 중)	20
2024	공사 착공(6월 중)	60
2025	조성 완료(6월 중) / 청정해수 공급시스템을 통한 해수 취수 및 공급	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		1,500	1,500		100	700	700
북항 해수 정화 인입시설 신설	도비	500	500		100	400
	시비	1,500	1,000			300	700

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	조영매 (2022.6. ~ 6.30.)	김세훈 (2022.6. ~ 6.30.)	박성순 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획 보고	조영매 (2022.7. ~ 8.)	김세훈 (2022.7. ~ 8.)	최은영 (2022.7. ~ 8.)
실천계획(2차) 보고	조영매 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김세훈 (2022.8.1. ~ 9.16.)	최은영 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		해양항만과장 조영매 항만물류팀장 김세훈 주무관 최은영