119. 목영대교 건설 추진

	【 취지 및 목표 】
❖ 목포 삼학도 ~ 영암 대불산단을 잇는 목영대교를 도개교로 조성하여 서남권 관광 활성화 도모 ❖ 목영대교 건설을 통한 교통량 분산 및 목포·영암 접근성 향상

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 ■	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 □ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 ■ 지 자 체 □	총사업비	190,000 백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2024 ~ 2033

□ 위    치 : 목포 남항 ~ 영암 대불

□ 사 업 량 : L=2.5㎞(교량 2㎞ / 접속부도로 0.5㎞), B=15m(편도 1차로)

□ 사업내용 : 목포 ~ 영암을 잇는“도개교”형식으로 조성하여 교통환경 개선 및 관광자원 활용(교량 2㎞, 주탑높이 189.7m)

□ 사 업 비 : 총 190,000백만원(국비 185,000, 시비 5,000)

□ 추진계획

□ 우리시 어려운 재정여건을 감안하여 국지도 49호선 및 지방도 806호선과 연계하여“국가사업”으로 지정 모색

지방도 지정 건의	→	국가지원지방도 승격 건의	→	( 반 영 시 ) 국가지원지방도 사업 추진 건의	→	( 예비타당성 조사 후 ) 사업추진
전남도 도로건설 관리계획 반영 (2026~2030년)		지방도 지정후 국가지원지방도 승격 건의		제7차 국도․국지도 건설계획(2031~2035년) 반영 요청		도로정책심의위원회를 거쳐 국토부 사업 추진 확정
목포시→전남도 (2022년 ~ 2023년)		도 ․ 시→국토부 (2026년 이후)		도 ․ 시→국토부 (2027년 ~ 2028년)		국토교통부 (2029년 이후)

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	• 사업구간 지방도 지정 건의(수시)	5
2023	• 사업구간 지방도 지정 건의(수시)	5
2024	• 사업구간 지방도 지정 건의(수시)	5
2025	• 전라남도 도로건설관리계획(2026년~2030년) 반영(지방도 반영 및 승격)	5
2026 ~	• 국지도승격, 제7차국도․국지도 건설계획 반영, 행정절차 및 실시계획 승인, 보상 및 공사추진	20

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		190,000	190,000		50			189,950
목영대교 건 설	국비	185,000	185,000					185,000
	도비
	시비	5,000	5,000		50			4,950
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	김재진 (2022.6.10. ~ 6.30.)	윤재웅 (2022.6.10. ~ 6.30.)	박대건 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	송창헌 (2022.7.5. ~ 7.29.)	정재홍 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김현곤 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	송창헌 (2022.8.1. ~ 9.16.)	정재홍 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김현곤 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		건설과장 송창헌 도로시설팀장 정재홍 주무관 김현곤