120. 삼학도 친수공간 조성 (어린이 테마파크 조성 등)

	【 취지 및 목표 】
❖ 원도심의 근대역사공간 등 관광자원과 연계하여 외부관광객 유치 및 삼학도 활성화를 위해 다양한 체험 및 놀이공간으로 조성

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	70,000백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023 ~ 2028

□ 위    치 : 삼학도 일원

□ 사업내용 : 어린이 테마파크, 테마정원, 워터프론트 광장 등

□ 사 업 비 : 총 70,000백만원

※ 추진방향 및 세부 사업내용 기본 및 실시설계 등 용역 결과로 확정

□ 추진계획

□ 사업구상 용역 추진	: 2023.

□ 도시계획관련 용역 추진 및 추진주체 결정	: 2023.

□ 실시설계용역 및 부지매입	: 2024. ~ 2025.

□ 공사추진	: 2026. ~ 2028.

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2023	사업대상지 검토 및 사업구상 용역 추진	10
2023	공원조성계획 변경 및 유원지 결정 추진주체(목포시 또는 민간사업자) 결정	20
2024 ~ 2025	실시설계용역 및 부지매입	50
2026 ~	공사 추진	100

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		70,000			450	20,000	20,000	29,550
삼학도 친수공간 조성	국비
	도비
	군비
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	손영란 (2022.6.10. ~ 6.30.)	백무황 (2022.6.10. ~ 6.30.)	정성훈 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	손영란 (2022.7.5. ~ 7.29.)	백무황 (2022.7.5. ~ 7.29.)	정성훈 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	손영란 (2022.8.1. ~ 9.16.)	백무황 (2022.8.1. ~ 9.16.)	정성훈 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		도시문화재과장 손영란 도심개발팀장 백무황 주무관 정성훈