128. 대연체육공원 시설 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 원도심의 부족한 공원 및 운동시설 인프라를 조성하여 여가와 힐링의 공간 제공 및쾌적하고 건강한 도시생활환경 조성

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	7,000 백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023. ~ 2025.

□ 위    치 : 목포시 용해동 547번지(대연초등학교 인근)

□ 사 업 량 : 체육공원 조성 1식(46,000㎡)

□ 사업내용 : 체육시설(풋살장, 족구장 등), 반려동물 놀이터, 조경시설 등

※ 조성계획은 실시설계 시 별도 보고 (파크골프장 18홀 조성 가능)

□ 사 업 비 : 총 7,000백만원(도비 2,000, 시비 5,000) ※ 보상비 30억 추정

□ 추진계획

□‘22. 10. ~ 12. : 투자심사 의뢰 및 심사(전남도)

□‘23.  1. ~ 12. : 공원조성계획 변경, 실시계획 인가 등

□‘24. ~‘25.    : 보상 및 공원조성

□ 연차별 추진 목표

연도별	추진 사항	달성도(%)
2022	지방재정 투자사업 투자심사(승인)	5%
2023	행정절차 이행 및 보상실시 - 공원조성계획 변경, 실시설계 및 실시계획인가 등	20%
2024	보상 및 공사착공	50%
2025	공사준공 및 도시계획시설사업 완료 공고	100%

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		7,000	7,000	-	300	3,000	3,700	-
대연체육공원 조성	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	2,000	2,000	-		1,000	1,000	-
	시비	5,000	5,000	-	300	2,000	2,700	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	박 진 홍 (2022.6. ~ 6.30.)	박 재 홍 (2022.6. ~ 6.30.)	전 욱 형 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	오 병 주 (2022.7.5. ~ 7.29.)	박 재 홍 (2022.7.5. ~ 7.29.)	-
실천계획(2차) 보고	오 병 주 (2022.8.1. ~ 9.16.)	최 양 선 (2022.8.1. ~ 9.16.)	이 종 희 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		공원녹지과장 오병주 공원시설팀장 최양선 주무관 이종희