129. 동별 공영주차장(주차빌딩) 및 동네 주차장 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 상가 및 다세대 주택 등 주거밀집지역 주차공간 부족, 시민 불편 고조 ❖ 지역 주민과 상권이 상생 가능한 단계적인 동네 주차장(주차타워 포함) 조성

사업기간	임기내 완료 ☑ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ☑ 비예산사업 □	사업비	국비 도비 □ 시비 ☑ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ☑	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ☑	총사업비	3,800백만원

□ 사업 개요

[용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업 (‘22. 1. ~ ‘23. 12.)]

□ 위    치 : 용당동 965-25번지 외 4필지(용당1동행정복지센터 옆)

□ 사 업 량 : 지상 3층(4단), 200면

□ 사 업 비 : 3,600백만원(국 50%, 시 50%)

□ 추진근거 : `22년 주차환경개선지원사업 공모 선정(국토교통부)

[동네주차장 조성(연중)]

□ 위    치 : 목포시 일원

□ 사 업 량 : 연 3~4개소

□ 사 업 비 : 연 50백만원(시비)

□ 추진 계획

[용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업]

□ 사업계획 변경(사업면적 증가에 따른 사업비, 사업기간 등 변경) :  `22. 10.

※ (당초) 3,000백만원, `22년 → (변경) 3,600백만원, `22년~`23년

□ 토지매입 등을 위한 행정절차 추진          : `22. 10. ~ `23. 3.

※ 도시관리계획(변경), 보상, 건설기술심의 등

□ 실시설계 완료                             : `23. 3.

□ 공사 완료                                 : `23. 4. ~ 11.

□ 사업 완료                                 : `23. 12.

[동네주차장 조성]

□ 옥암동 1196-5일원 (546㎡) 16면                    : `22. 10.

□ 용당동 964-133일원 (155㎡) 6면                    : `22. 10.

□ 산정동 11 일원 (221㎡) 8면                        : `22. 11.

※ 토목 및 부대공사, 주차선, 폐기물처리, 주차안내판 설치 등

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	용당1동 공영주차장 조성사업 : 행정절차(80%), 동네주차장 조성	100
2023	용당1동 공영주차장 조성사업 : 행정절차(100%), 사업완료(100%)	100
2024	용당1동 공영주차장 : 유지관리(100%), 동네주차장 조성	100
2025	용당1동 공영주차장 : 유지관리(100%), 동네주차장 조성	100
2026	용당1동 공영주차장 : 유지관리(100%), 동네주차장 조성	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		3,800	3,800	130	3,570	50	50
용당1동 공영주차장 주차타워 및 동네주차장 조성	국비	1,800	1,800	40	1,760
	도비
	시비	2,000	2,000	90	1,810	50	50
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	구 준 (2022.6.10. ~ 6.30.)	박철우, 설동진 (2022.6.10. ~ 6.30.)	정경만, 나상원 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	윤병종 (2022.7.5. ~ 7.29.)	박재홍, 설동진 (2022.7.5. ~ 7.29.)	정경만, 나상원 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	윤병종 (2022.8.1. ~ 9.16.)	박재홍, 설동진 (2022.8.1. ~ 9.16.)	정경만, 나상원 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		교통행정과장 윤 병 종 교통시설팀장 박 재 홍 주무관 정 경 만 대중교통팀장 설 동 진 주무관 나 상 원