133. 구)경찰서 사거리 교통 병목 해소(우회도로 개설)

	【 취지 및 목표 】
❖ SOC 확충 등 쾌적한 생활환경 조성으로 시민 삶의 질 제고

사업기간	임기내 완료 ◼ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ◼ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 ◼ 민자 ◼
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ◼	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ◼	총사업비	291억원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 12.

□ 위    치 : 용해지구 인근

□ 사 업 량 : 구조개선 2개소, 우회도로 개설 2개소, 도로확장 3개소

□ 사 업 비 : 총 291억원(도비 22, 시비 127, 기타(민자) 142)

□ 추진계획

연번	위치	사업량	사업비	주체	완료 년도	비고
①	구.경찰서사거리 ~ 용해삼거리	차로 추가 확보 L=400m, B=25~30m, 신호체적화 [왕복 4차로 ⇒ 왕복 6차로]	15억 (도로확장 9, 지중화등 6)	목포시	2024	단기
②	실내체육관~ 양을산산림욕장	도로개설 L=650m, B=20m (왕복4차선)	80억	목포시	2025	중기
③	실내체육관~ 삼향동사무소	위험도로개선 L=700m 1구간: L=300m 2구간: L=400m	44억 1구간: 44억 (도비 22, 시비 22)	목포시	2026	장기
④	용해2지구~ 마리아회고	도로 개설 L=720m, B=16m [왕복 4차로, 양측 인도]	100억	민간	2025	중기
⑤	산정근린공원~ 다부재길	도로 개설 L=490m, B=8m [왕복 2차로, 편측 인도]	25억	민간	2025	중기
⑥	다부재길 ~ 산정로	도로 개설 L=272m, B=8m [왕복 2차로, 편측 인도]	20억 (민자 10 시비 10)	민간+시	2025	중기
⑦	용해2단지 재건축 1차선확보	도로1차선 확보(Setback) L=330m	7억	민간	2025	중기
소계	7건	L=3,532m	291억	시+민간	4년	(도비 22 시127, 민142)

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진 사항		달성도(%)
2022	연도별 목표	도로구조개선 및 우회도로 1개소 실시설계	10
	추진계획	‘22. 9 : 설계용역 예산확보 ’22. 10 : 실시설계 발주
2023	연도별 목표	도로구조개선 완료 및 우회도로 1개소 추진	40
	추진계획	’23. 12: 구)경찰서사거리~용해삼거리간 도로구조개선 추진 실내체육관~양을산산림욕장간 도로 공사추진
2024	연도별 목표	우회도로 4개소 계속 추진	60
	추진계획	’24. 6: 구)경찰서사거리~용해삼거리간 도로구조개선 완료 ’24. 12 : 용해2지구 ~ 마리아회고외 4개소 도로 개설 공사 추진
2025	연도별 목표	우회도로 4개소 개설 완료	100
	추진계획	’25. 12 : 용해2지구 ~ 마리아회고외 2개소 도로 개설 공사 완료(민자사업) 실내체육관~양을산산림욕장간 도로개설 추진(‘26년 준공)

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	충사업비	예산 투입현황					비고
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계			29,100	200	8,900	8,400	9,800	1,800
우회도로 개설	국비
	도비		2,200		700	700	800
	시비		12,700	200	4,200	2,700	3,800	1,800백만원 (‘26년)
	기타		14,200		4,000	5,000	5,200	민자

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	오병주 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김용균 (2022.6.10. ~ 6.30.)	조형근 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	이충완 (2022.7.5. ~ 7.29.)	차태명 (2022.7.5. ~ 7.29.)	조형근 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	이충완 (2022.8.1. ~ 9.16.)	차태명 (2022.8.1. ~ 9.16.)	조형근 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		도시계획과장 이충완 개발팀장 차태명 주무관 조형근