공약연번	대연체육공원 시설 조성		담당부서
128
			공원녹지과

	최종목표
주민수혜도 및 시민들의 호응이 많은 가족친화형 테마공원 조성

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10%	총사업비	7,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026.

○ 위    치 : 대연체육공원 (용해동 574)

○ 사 업 량 : 체육공원(46,450㎡) 조성

○ 사업내용 : 시니어친화형 파크골프장, 어린이친화놀이시설, 맨발길 등 주민편의시설, 녹지공간 및 주차장 등 편의시설 조성

○ 사 업 비 : 총 7,000백만원(공사비 4,000, 토지 등 보상비 3,000)

☐ 추진현황

○ 2023. 8. : 실시설계 및 공원조성계획(변경)용역 착수

- 용역기간 : ‘23. 8. 16. ~ ‘24. 6. 10.

- 계 약 자 : ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소

- 계약금액 : 218백만원

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2023	실시설계용역	설계용역 추진중	10%
2024	실시설계용역, 토지보상	-	30%
2025	토지보상, 계약심사 등	-	60%
2026	사업추진	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	7,000		250	2,500	2,500	1,750
확보액	250		250	-	-	-
집행액	0		-	-	-	-

☐ 향후계획

○ 2024. 1. ~ 2024. 12. : 공원조성계획변경, 계약심사 등 행정절차이행

○ 2024. 1. ~ 2025. 12. : 토지 및 지장물 보상, 국비 등 사업공모

○ 2025. 1. ~ 2026. 12. : 공사시행

※목차

담당부서		공원녹지과장 최양선 공원시설팀장 김영범 주무관 이종희(☎3634)