공약연번	1호광장~서울병원 간 도로 구조 개선사업		담당부서
134
			건설과

	최종목표
`22년 교통사고 잦은 곳 개선사업으로 `1호광장~서울병원 사거리`(L=1.2km) 구간이 선정(교통사고다발지점)됨에 따라, 도로 구조 개선 등을 통한 안전한 교통환경 조성

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	5 %	총사업비	810백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 3월

○ 위    치 : 1호광장 ~ 서울병원(L=1.2km)

○ 사 업 비 : 810백만원(도비 405, 시비 405)

○ 사업내용 : 교통신호기 및 교통안전시설 설치, 차로 및 교차로 가각 조정 등

☐ 추진현황

○ 2022.  7. : 교통사고 잦은 곳 개선사업 선정(전남도)

○ 2022. 12. : 기본 개선계획 접수(도로교통공단→목포시)

○ 2023.  1. : 도비 지원계획 확정(도비 405백만원)

○ 2023.  3. : `23년 제1회 추경예산 반영

○ 2023.  4. : 실시설계 착수

○ 2023. 10. : 실시설계 완료 / 관계기관(경찰서, 도로교통공단) 협의

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	1

※ 주민홍보 요청(관할 동) : 1회

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2023	공사 착공	- 실시설계, 관계기관 협의	5%
2024	사업 완료
2025
2026

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	810		810
확보액	810		810
집행액	810		60	750

☐ 향후계획

○ 2023. 11. : 공사 착공

○ 2024.  3. : 사업 완료

※목차

담당부서		건설과장 김재진 도로정비팀장 최영종 주무관 정경만(☎8645)