공약연번	옥암 지하차도 건설		담당부서
135
			도시문화재과

	최종목표
‘옥암 지하차도 개설사업`을 현재 교통여건이 반영된 `교차로 구조 개선 사업` 으로 변경‧추진하여 교차로 서비스 수준 향상을 도모하고 구조개선 된 교차로에 목포시만의 특색있는 디자인을 도입해 도시 이미지 개선 기여

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ○ 지자체 ●	추 진 율	10%	총사업비	33,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진○ 일부추진 ● 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

○ 위    치 : 해수청 사거리, 도청입구 사거리

○ 사업내용 : 교차로 구조개선(2개소) * 당초(지하차도 2개소)

위 치	당 초	변 경
해양수산청	지하차도 (L=600m, B=17.5m)	고가차도 설치(L=460m)
도청입구	지하차도 (L=560m, B=17.5m)	평면교차로 개선(L=1,125m)

○ 사 업 비 : 330억원 추정(시비) * 당초(1,500억원 추정)

☐ 추진현황

○ ‵22. 10. : 옥암지구 교통영향분석 및 개선대책 수립 용역 실시

○ ‵23.  5. : 교통영향평가 관련 사항 협의(전라남도 지역계획과·도로교통과)

○ ‵23.  8. : 교통영향평가 관련 협의 및 교차로 구조개선 사업 변경 도지사 건의

○ ‵23.  9. ~ 10. : 교통영향평가위원회(변경심의) 안건 상정 예정
☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	교통영향평가 심의추진	협의 요청	5%
2023	교통영향평가 관련 사항 및 교차로 구조개선(안) 협의	전남도청 도로교통과와 협의중	10%
2024	기본·실시설계 용역 추진		40%
2025	공사 착공 및 준공		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	33,000	-	-	1,519	31,481	-
확보액	-	-	-	-	-	-
집행액	-	-	-	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 도 교통영향평가 위원회 안건 상정 시, 교차로 구조 개선안에       도시 미관 개선대책 요구 예상

⇒ 교차로 환경개선 방안 마련을 위한 별도 설계 용역 완료

☐ 향후계획

○ ‵24. 1. ~  8. : 도시 미관 개선 시민의견 수렴 및 실시설계 용역

○ ‵25. 1. ~ 12. : 도시관리계획 변경 및 옥암부지 준공, 공사 시행

※목차

담당부서		도시문화재과장 김재성 공영개발팀장 안영옥 주무관 김도현(☎3442)