공약연번	어구류 보관 및 관리시설 확충		담당부서
88
			수산산업과

	최종목표
무질서하게 적재·방치된 어업기자재 보관 및 공동작업장 설치에 따른 어업인 편의 도모

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	30%	총사업비	513백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위    치 : 북항 배후부지 어항시설 유보지 내(외측 호안 일원)

- 물양장 확충 부지 20,650㎡(호안시설 413m, 마무리 호안 50m)

○ 사 업 량 : 부지 10,000㎡, 건축물(철골구조) 1동

○ 사업내용 : 부지 조성, 어구보관창고 및 공동작업장 시설 설치

○ 사 업 비 : 총 513백만원(균특전환사업 대상으로 추진 중)

- 도비 240, 시비 273백만원(도 지원 한도액 : 개소당 시설비 300백만원 중 80%)

☐ 추진현황

○ 어업인 편익시설 의견수렴 및 현지조사 :‘22. 8.

- 연안개량안강망협회장(최노아) 면담

○ 북항 배후부지 내 미활용 잔여부지 사용자협의 :‘22. 9. ~ 12.

- 목포수협 : 수산지원시설로 중장기 개발계획으로 사용불가(죽교동 692-1/32,323㎡)

- 목포해경 : 다목적 실내체육관 건립 전제 조건 수용 불가(죽교동 691/37,752㎡)

○ 목포해양수산 행정협의회 안건 건의 :‘22. 11.

- 안    건 : 북항 어선 물양장 건립지 활용

- 검토결과 : 어업인 등 폭넓은 이용자 의견수렴 후 활용

○ 북항 어선 물양장 확충 부지 사용 협의(목포해수청) :‘23. 4.

○ 재원확보 추진  :‘23. 6.

- (도비)2024년도 균특회계 전환사업 예산 신청 → 전남도('23. 6.)

○ (구)목포수협 위판장 항만시설 사용 허가 사전협의(목포해수청) :‘23. 7.

- 내    용 : (구)목포수협 위판장 부지에 어구류 보관시설 등 조성

- 검토결과 : 목포내항 여객부두 건설공사 착공으로 사용 불가

○ 사업대상부지 사용 협의(목포해수청) :‘23. 9.

- 북항 소형어선 물양장 ⇒ 폭이 매우 좁아 어루규 보관시설 조성 부적합

- 북항 배후부지 내 목포수협 배정부지 ⇒ ｢어촌어항법｣상 기능시설에 해당, 북항에 설정된 ‘어항구’ 내 수용가능한 시설로 적합

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	□ 의견수렴 및 현지조사 □ 사업대상부지 사용협의	□ 사업대상부지 사용협의 4회(‘22. 9. ~ 12.)	20%
2023	□ 사업대상부지 사용협의 □ 재원확보	□ 사용협의 진행중(목포해수청) □ ‘24년 전환예산 신청완료	50%
2024	□ 재원확보 □ 기본설계 발주 □ 비관리청 항만공사 허가·승인협의 □ 공사 착공 및 준공	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	513			513
확보액
집행액

☐ 문제점 및 대책

○ (구)목포수협 위판장 부지는 “목포내항 여객부두 건설공사” 착공 및 기자재 등 적치 예정으로 항만시설 사용허가 불가

○ 북항 소형어선 물양장은 휴식부두 및 보급부두의 성격으로 폭이 50m로 매우 좁아 어구류 보관시설을 조성하기엔 부적합

○ 목포해경 북항 배후부지는 다목적 실내체육관 건립 전제 조건 수용불가

○ 북항 소형어선 물양장의 면적 감안, 사업예정 부지 검토 후 재협의 추진

☐ 향후계획

○ 사업대상부지 사용 재협의(목포지방해양수산청) :‘23. 12.

- 목포 북항 어선 물양장 확충 공사 완료 예정('23. 12.)

○ 상세계획 수립                          :‘24. 1.

○ 재원확보                               :‘24. 2.까지

- (도비)2024년도 균특회계 전환사업 예산 신청 → 전남도('23. 6.)

- (시비)2024년도 추경예산 신청('24. 2.)

○ 설계용역 발주                          :‘24. 2.

○ 비관리청 항만공사 허가·승인 협의      :‘24. 3.

○ 공사 착공 및 준공                      :‘24. 6. ~ 9.

※목차

담당부서		수산산업과장 김일섭 수산진흥팀장 신경아 주무관 노유선(☎8077)