시공 중인 공동주택 현황

□ 공동주택 공사 현황                     (2020년 3월 2일)

구분	연번	아파트 명 칭	위 치	사업주체	시공자	규 모				사업승인일	착 공 일 (사용검사 예 정 일)	비 고
						대지면적 연 면 적	층수	구분 (임대분양)
							동수	평형별
총계			13개소 (민간11,공공2)				5,058세대 ( 분양 3,020 / 임대 2,038 )
분 양	1	주하우제 스카이	상동 1022 외 3필지	자이종합건설(주)	자이 종합건설(주)	1,928 16,999	27층	분양	100	2016.10.06	2018.08.20 (2021.03.31)	공정률 28% (골조공사)
							1동	84	100
	2	옥암3차 한국아델리움	옥암동 916 외1	(유)와이디개발	한국건설(주)	12,066 36,920	20층	분양	314	2017. 11. 17.	2017.12.21 (2020.6.30.)	공정률 81% (마감공사)
							5동	59	188
								84	126
	3	중흥S-클래스	상동 860번지	주식회사 다원개발	중흥토건(주)	10,000 139,308	49층	분양	640	2018.7.24	2018.8.30. (2022.8.31.)	공정률 20% (토목공사)
							4동	110	152
								134	4
								158	4
								196	4
								221	4
								84	472
	4	대경 천사케슬 주상복합	상동 778	유한회사 대경이엔씨	주식회사 세림건설	1,004 5,689	12층	분양	76	2017. 8. 17	2019. 5. 2 (2020.9.30..)	공정률 20% (기초공사)
							1동	32	5
								36	65
								39	6
	5	신항만 뉴캐슬 오션시티2차	달동 1331-8	㈜세종 건설산업	㈜미래종합 건설	17,524 46,054	15층	분양	348	2019. 8. 14	2019. 9. 27 (2021.11.30.)	공정률 7.5% (토목공사)
							6동	61	90
								79	258
지역 주택 조합	6	서희 스타힐스	석현동 850번지 일원	목포석현 지역주택조합	㈜서희건설	54,299 149,072	20층	분양 (조합)	1,186	2017. 7. 14.	2017.11.10 (2020.09.01)	공정률 80% (마감공사)
							12동	59	328
								74	405
								84	453

구분	연번	아파트 명 칭	위 치	사업주체	시공자	규 모				사업승인일	착 공 일 (사용검사 예 정 일)	비 고
						대지면적 연 면 적 사업비 (천원)	층수	구분 (임대분양)
							동수	평형별
총계
민간 임대	7	라송센트럴 카운티 5차	석현동 1060 외37	라송산업(주)	(주)한토건설	34,130 108,290	25층	임대	756	2018. 4. 30	2018. 5.29 (2020.8.31)	공정률 90% (마감공사)
							9동	84	508
								78	248
	8	프라임 아너팰리스	상동 1002 외5	유한회사 프라임디앤씨	미래 종합건설 주식회사	3,562 21,463	19층	임대	171	2017. 9. 21	2018.4.17 (2020.5.31)	공정률 85% (마감공사)
							3동	59	171
	9	대광로제비앙	산정동 992-7 외26	주식회사 포레지아	주식회사 대광건영	21,525 58,628	17층	임대	416	2016. 11. 9	2018.2.19 (2020.12.31)	공정률 42% (골조공사)
							8동	80	416
	10	남교 크레지움 에듀파크	남교동 1-1 16필지	향원주택(주)	호림건설(주)	2,419 13,517	25층	임대	83	2018. 2. 9	2018.6.14 (2020.4.30)	공정률 92% (마감공사)
							1동	72	83
	11	목포5차 한국 아델리움 더 숲	석현동 816-10	한국주택건설(주)	한국건설(주)	9,719 33,389	18층	임대	212	2019. 7. 4	2019.9.2. (2022.10.30.)	공정률 5.2% (토목공사)
							5동	84	212
공공 건설	12	목포 법원 행복주택	용해동 824번지 일원	한국토지주택 공사	(주)KR산업 (주)덕흥건설	10,604 23,593.01	20층	임대	400	2017. 7. 3	2019.5.17 (2021.4.7.)	공정률 20% (기초공사)
							2동	16	120
								26	120
								36	120
								44	40
	13	백련지구 골드클래스	백련지구 1블럭	한국토지주택 공사 외1	보광종합건설	19,608 53,795	15층	분양	356	2012. 12. 23. (국토부승인)	2018.10.10 (2021.4.30)	공정률 45% (골조공사)
							5동	69	103
								76	2
								79	251