109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
용해2지구∼백련 펌프장간 하수관거 정비	18,550	10,715	2,071	2,807	2,957	2021	2011	60%
남악신도시 하수 처리장 증설	29,656	24,498	5,158	-	-	2019	2013	100%
상동초기우수처리 시설 설치사업	15,609	14,457	1,152	-	-	2019	2014	100%
대양이로하수처리분구 연계처리시설	10,281	7,269	1,812	1,200	-	2020	2014	89%
하수도정비 중점관리지역 정비	35,016	21,236	2,991	10,789	-	2023	2014	95%
목포 화물자동차 공영차고지 건립	36,000	23,825	-	10,457	1,718	2021	2015	66%
서산,온금 지구 재정비 촉진지구 기반시설조성	39,400	9,463	274	1,400	26,000	2024	2015	34%
유달산 목재문화 체험장 조성	6,400	-	2,700	500	3,200	2021	2015	80%
목포권광역위생 매립장	33,964	9,334	3,172	8,815	12,643	2022	2016	37%
고하도 주차장 조성	2,900	2,270	630	-	-	2019	2016	100%
행남사~삼진물산 간 도로개설	4,200	1,361	952	1,867	-	2020	2016	70%
도시재생 선도지역사업	20,180	18,528	1,046	-	-	2019	2017	100%
동명동 송도마을 취약지역 개선사업	4,301	1,142	650	2,509	-	2020	2017	60%
가톨릭성지 주변 도로개설	4,100	3,900	-	200	-	2020	2017	90%
국립호남권 생물자원관 건립	49,300	49,300	28,800	-	-	2019	2019	100%
유달산주차장 조성	5,400	4,340	1,060	-	-	2019	2017	100%
고하도목화(육지면)단지조성사업	6,400	-	2,700	500	3,200	2021	2017	80%

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
목포 해식애 해안길 조성사업	3,900	-	-	3,900	-	2021	2017	20%
대성동주민센터 주변 공영주차장 조성	2,200	-	1,130	1,070	-	2020	2017	52%
2018년 목포시 지능형 교통체계 구축사업	2,000	-	2,000	-	-	2019	2018	100%
목포 문화재 야행사업	360	-	360	-	-	2019	2018	100%
목포국제축구센터 인조구장 잔디교체	3,400	1,333	-	2,067	-	2020	2018	70%
유달산 남도명품 관광지 조성	2,700	846	1,854	-	-	2019	2018	100%
목포항구축제	615	-	615	-	-	매년	2018	100%
목포종합경기장 건립	920,000	400	14,344	22,656	54,600	2022	2018	12%
맛의 도시 선포식 및 맛페스티벌 개최	180	-	180	-	-	2019	2018	100%
달리도항,어망촌항 슬로우 아일랜드 조성사업	12,637	-	750	9,361	2,526	2021	2019	40%
목포 반다비 체육센터 (장애인 체육센터)	8,000	-	-	354	7,646	2022	2019	10%
고하만남의 광장 조성	3,800	-	-	200	3,600	2021	2019	5%
목포 유달산 봄축제	190		190	-	-	매년	2019	100%
목포 근대문화사길안전한보행환경 개선사업	2,200	-	42	623	1,535	21년	2019	10%
(구)목포경찰서 부지 및 건물취득, 처분	4,988	-	-	4,988	-	2020	2019	70%
유달동 대반마을 도시취약지역 생활여건 개조사업	4,538	-	-	800	3,738	2022	2019	10%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용해 2지구∼백련펌프장간 하수관거 정비

담당자

하수과 이정훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구 일원의 배수구역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2021년

○ 위 치 : 신동마을 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관로 신설 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,550	10,715	2,071	2,807	2,957
국 비	12,985	9,655	1,523	1,807	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,565	1,060	548	1,000	2,957

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ '16. 10. : 공사착공

○ '17.  9. : 1차분 공사준공(소망원 입구 하수관로 L=406m 및 개거정비 264m)

○ '18.  6. : 2차분 공사준공(신동마을 앞 하수관로 L=714m 중 L=140m)

○ '19.  3. : 3차분 공사준공(신동마을 ~ 자동차학원 관거정비 L=180m)

○ '20.  3. : 6차분 공사착공(L=109m)

○ '20.  4. : 4차분 공사준공(L=80m)

○ '20.  5. : 5차분 공사준공(L=31m)

□ 향후계획

○ '21.  1. : 6차분 공사준공(L=109m) - 총 1,210m 완료

○ '21. 12. : 하수관거 정비사업(하수관거 잔여분 L= 174m) 공사준공

사업명

남악신도시 하수처리장 증설사업

담당자

하수과 이정훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도

증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013년 ~ 2019년

○ 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지(남악신도시 하수처리장 내)

○ 규 모 : 시설용량 10,000㎥/일 증설(기존 12,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  29,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,656	24,498	5,158	-	-
국 비	12,969	12,969	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	16,687	11,529	5,158	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '13.  4. 15. : 하수종말처리장(2단계) 증설 분담 협약

○ '13.  5. ~ ‘15.  3. : 기본 및 실시설계

○ '15. 12.  9. : 총괄분 및 1차분 착공

○ ‘16. 10.  3. : 1차분 완료(PHC 말뚝 및 지하터파기)

○ ‘17. 6. 26. : 2차분 완료(가시설, 지하터파기 및 구조물공사)

○ ‘18. 5. 31. : 3차분 완료(구조물 공사, 건축공사 및 방류관로 매설)

○ ‘19. 4. 30. : 4차분 완료(기계설치 및 배관공사)

○ '19. 10. 18 : 5차분 완료(도로 포장 및 시운전)

○ ‘19. 12. 27. : 공사 완료

사업명

상동초기우수처리시설 설치사업

담당자

하수과 이정훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스  터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2019년

○ 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

○ 규 모 : 저류조 V=10,000㎥(L=55m, B=40m, H=5.5m), 기계실, 전기실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,609백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,609	14,457	1,152	-	-
국 비	10,926	10,926	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,683	3,531	1,152	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13.  4. : 기본 및 실시설계용역 완료 및 공사착공

○ ‘16.  1. : 1단계 사업 준공(저류조 설치완료)

○ ‘16.  3. : 2단계 사업 착공(우수암거, 차집시설, 전기실 등)

○ ‘17.  8. : 3차분 사업 착공(기계실 건축)

○ ‘17.  9. : 2차분 사업 준공

○ ‘18.  2. : 3차분 사업 준공 및 4차분 착공

○ '18.  12. : 토목, 건축, 조경공사 총괄분 준공

○ '19.  4. : 전기공사 준공

사업명

대양이로하수처리분구 연계처리시설

담당자

하수과 이정훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원

○ 규 모 : 중계펌프장 2개소(대양산단, 월산마을), 압송관 5.1km, 이로중계펌프장 및 대양펌프장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,281백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,281	7,269	1,812	1,200	-
국 비	4,840	4,840	-	-	-
시 도 비	483	483	-	-	-
시군구비	4,958	1,946	1,812	1,200	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

○ ’13.  3. : 공사착공

○ ’16.  6. : 1 ~ 4차분 공사 준공(관로매설완료) 및 이로중계펌프장 준공 및 가동,

대양펌프장 압송관로(5.1km) 완료

○ ’19.  8. : 5차분 공사 착공(대양펌프장 5,000㎥/일)

□ 향후계획

○ ’20.  8. : 5차분(토목ㆍ건축) 공사 준공

○ ’20.  8. : 6차분(기계) 공사 착공

○ ’20. 12. : 시운전 후 공사 준공

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비

담당자

하수과 이정훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 빈도 침수피해를 대비하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정되어

하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2023년

○ 위 치 : 용당 1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 입암천바닥정비 L=1.31km, 상동지구 방류관로, 상리대하수도 PC  암거 L=121m, 제어관리시스템 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	35,016	21,236	2,991	10,789	-
국 비	24,511	21,236	2,975	300	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,505	-	16	10,489	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ '17.  2. ~ 4. : 1 ㆍ 2차분 공사 착공

○ '18. 11. : 1차분 공사준공

○ '20.  2. : 남해배수펌프장 유출수문 설치 완료

○ '20.  2. : 하당지구 압송관로 290m 시공 완료

○ '20.  3. : 남해배수펌프장 배수갑문 설치 및 지배수펌프 신설공사 완료

○ '20.  4. : 남해배수펌프장 배수펌프(수중축류) 설치 완료

○ '20.  6. : 남해유수지 폐기물처리 용역 완료

□ 향후계획

○ '20.  8. : 2차분 공사준공

○ '23. 12. : 하수도 중점관리지역 정비사업 완료

사업명

목포 화물자동차 공영차고지 조성

담당자

교통행정과 김기복(☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해안과 남해안 고속도로의 시‧종점, 무안국제공항, 신항만 등이 위치하여 물류거점 도시로써 원활한 역할을 수행하고, 불법주정차 민원 해결을 통한 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 대양동 1183, 1186번지

○ 규 모 : 91,476.9㎡(27,671평) / 991면(주차장, 휴게‧정비‧관리동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,000백만원(국16,683/시7,142/민간12,175)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	36,000	23,825	-	10,457	1,718
국 비	16,683	16,683	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,142	7,142	-	-	-
민간자본	12,175	-	-	10,457	1,718

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ ‘18. 11월 : 부지매입 및 등기이전 완료

○ ‘19. 11월 : 민간사업자 공모 공고

○ ‘19. 12월 : 사업계획서 접수

○ ‘20.  2월 : 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정

○ ‘20.  4월 : 실시협약 체결

□ 향후계획

○ ‘20.  8월 ~ 9월 : 실시계획인가 및 건축허가

○ ‘20. 11월 : 공사 착공

○ ‘21. 12월 : 공사 준공

사업명

서산ㆍ온금 재정비 촉진지구

기반시설 조성사업

담당자

도시문화재과 정재홍(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서산ㆍ온금지구는 목포의 대표적인 노후ㆍ불량주거지로 주거환경이 열악하고 낙후된 도시기반시설로 인해 누적된 도시문제가 발생되는 지역으로 금번 기반시설 설치사업으로 지역주민 숙원 해결과 원도심 공동화를 해소하고 지역간 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2024

○ 위 치 : 목포시 서산동, 온금동, 금화동 일원

○ 규 모 : 도로4개소(3.3㎞), 공원(46,362㎡), 녹지9개소(19,485㎡), 주차장1개소(2,364㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,400백만원(국비 19,700, 지방비 19,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	37,137	9,463	274	1400	26,000
국 비	18,568.5	4,731.5	137	700	13,000
시군구비	18,568.5	4,731.5	137	700	13,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 34%)

○ 2009. 11. 27. : 서산ㆍ온금 재정비 촉진지구 지정(전남도 고시 제2009-453호)

○ 2012. 11.  5. : 서산ㆍ온금 재정비 촉진계획 결정(전남도 고시 제2012-368호)

○ 2013.  7. 16. : 국토교통부 신규 지원(국비 50%) 사업에 선정

○ 2013 ~ 2015 : 서산ㆍ온금지구 재정비촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계용역

○ 2015.  2. 24. : 지방재정 중앙투자심사 조건부 의결 통보(394억원)

○ 2015.  6. 18. : 목포 도시계획시설[서산온금지구 내 도로, 주차장, 녹지, 공원]사업

실시계획 인가고시

○ 2015. 10.  6. : 재정비촉진1구역 주택재개발정비사업조합 승인

○ 2016. 1.~현재 : 온금근린공원 보상 추진

○ 2020.  4.  2. : 2020년 제1차(정기) 지방재정 중앙투자사업 재심사-적정

□ 향후계획

○ 2020. 8. ~ 12. : 온금근린공원 보상 추진

○ 2021. 1. ~ 12. : 온금근린공원 조성공사 추진

○ 2022  ~  2024 : 도로3개소, 주차장 1개소, 경관녹지 9개소 조성

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- (당초) 2013. 3월 ~ 2020. 12월 ⇒ (변경) 2013. 3월 ~ 2024. 12월

사업명

유달산 목재문화체험장 조성

담당자

공원녹지과 김현수(☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고하도 목화(육지면) 최초 재배지에 목화체험전시관을 조성해 지역

향토산업으로 육성하여 목포 해상케이블카, 국립호남권생물자원관, 고하도      역사유적공원 조성사업, 고하도 용오름길 등과 연계한 관광상품으로 개발

○ 지역민의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하고 시대적 상황에

맞는 친환경 힐링사업으로 부가가치가 높음.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018 ~ 2021

○ 위 치 : 고하도 일원

○ 규 모 : 목화정원 조성 28,100㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,400	-	2,700	500	3,200
국 비	1,350	-	1,350	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,050	-	1,350	500	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 목화체험장 조성사업 완료

□ 향후계획

○ ‘20. 8월 어린이놀이시설 설치사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 목화체험장 조성지 변경 : 당초)충무분교(달동 800-8) ⇒ 현재)목화정원 내(달동 1332일원)

○ ‘17~’18 LM-목화발견으로 목화 재배면적 확대에 어려움이 있어 현) 목화정원 내 목화 식재 (고하도 내 토지보상 면적 축소)

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과

황혜미(☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립장의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용   중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장 내)

○ 규 모 : 폐기물 굴착ㆍ선별 645,000㎥, 매립장 조성 34,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,964백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	33,964	9,334	3,172	8,815	12,643
국 비	16,100	4,229	1,491	4,143	6,237
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	17,864	5,105	1,681	4,672	6,406

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ ’16.  3. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료

○ ’18. 10. : 기본 및 실시설계 용역 · 도 건설기술심의 완료

○ ’19.  9. : 시설공사 계약체결 및 착공

□ 향후계획

○ 매립폐기물 굴착·선별 및 압축·포장작업  준공 : ’22. 9.

○ 차수재 보수 및 설치(매립장 조성) : ’22. 9.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비

- 당초 : 40,820백만원(국비 19,146, 시비 21,674)

- 현재 : 33,964백만원(국비 16,100, 시비 17,864)

○ 사업규모

- 당초 : 매립장 굴착·선별 750,000㎥, 조성 50,500㎡

- 현재 : 매립장 굴착·선별 645,000㎥, 조성 34,778㎡

사업명

고하도 주차장 조성

담당자

관광과 김승규(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 해상케이블카 및 고하도를 방문하는 지역주민과 관광객을 위한 기반시설(주차장) 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 목포 달동 844번지

○ 규 모 : 주차장 조성(A17,429㎡), 주차대수 395대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,900	2,270	630	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,600	1,100	500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,300	1,170	130	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 3. : 투자심사 완료

○ 2017. 9. : 실시계획 인가고시 및 착공

○ 2019. 7. : 사업준공

사업명

행남사∼삼진물산간 도로개설

담당자

도시계획과 김현수(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획 시행으로 인한 주민숙원 해소 및 세라믹 산단 연결도로 개설로 인한 산단 활성화 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 행남사 사거리 ~ 삼진물산

○ 규 모 : 도로개설 L=560m, B=16.8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,200	1,361	952	1,887	-
국 비	1,298	598	212	488	-
시 도 비	500	-	131	369	-
시군구비	2,402	763	609	1,030	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘18. 9. ~ ‘18. 12. : 1구간(행남사사거리~세안병원) 도로개설 완료(L=280m)

○ ‘19.12. ~ ’20. 12. : 2구간(세안병원~삼진물산) 도로개설 공사중

□ 향후계획

○ ‘20. 12. 까지 : 2구간(세안병원~삼진물산) 도로개설 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

도시재생 선도지역사업

담당자

도시재생과 권순구(☎270-8744)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사ㆍ문화ㆍ관광자원 활용한 관광활성화로 목포의 원도심 목원동 활력 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘14~’17(2년연장)

○ 위 치 : 목원동 일원

○ 규 모 : 유휴시설 활용 역사ㆍ문화ㆍ관광 활성화 등 마중물 10개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,180	18,528	1,046	-	-
국 비	10,090	9,264	523	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,090	9,264	523	606	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘14. 04 : 도시재생 선도지역 전국 13곳 지정(목포시 지정)

○ ‘14. 12 : 도시재생활성화계획 국토부(특별위원회) 승인

○ ‘17. 03 : 도시재생활성화계획 국토부 관문심사 승인

○ ‘19. 12 : 도시재생 선도지역사업 종료

○ ‘20. 05 : 목포시 도시재생 선도지역사업 정산보고(국토부)

□ 향후계획

○ ‘20. 12월까지 : 집행잔액 및 발생이자 반납(고지서)

사업명

동명동 송도마을취약지역 개선사업

담당자

도시재생과 강찬승 (☎270-3649)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시취약 지역의 열악한 기초생활인프라 정비, 주거환경 개선 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위 치 : 동명동 162번지 일원(동명동 송도마을)

○ 규 모 : A=14,547㎡(5개 분야, 22개 세부사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,301백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,301	1,142	650	2,509	-
국 비	3,287	854	604	1,829	-
시 도 비	304	68	28	208	-
시군구비	710	220	18	472	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘16. 02. : 공모사업 대상지 선정

○ ‘17. 06. : 주민협의체 구성 및 마스터플랜(안) 수립

○ ‘17. 11. : 마스터플랜(안) 승인 (국토교통부 -> 목포시)

○ ‘18. 05. : 경로당 리모델링 공사 완료

○ ‘18. 12. : 진입도로(위험옹벽)공사 및 마을안길 공사 등을 위한 공폐가 철거

○ ‘19. 12. : 도시계획시설(마을안길 및 커뮤니티센터) 실시계획 인가고시

○ ‘20.  4. : 집수리지원사업(1차) 및 나대지 정비사업 완료

□ 향후계획

○ ‘20. 7. ~ : 소프트웨어 사업(주민소득사업, 기록화 사업 등) 추진

○ ‘20. 7. ~ : 마을안길 도로공사 등 협의보상 및 시설 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ [변경 전] 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

[변경 후] 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

사업명

가톨릭성지 주변 도로개설

담당자

건설과 박재광(☎270-3484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포도시관리계획 도시계획도로 시행으로 주민숙원사업 해소

○ 도로망 구축으로 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 산정동 74-190번지 일원(중로3-74호선, 소로2-623호선)

○ 규 모 : 도로개설(L=520m, B=8~12m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,100	3,900	-	200	-
국 비	2,700	2,500	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,600	1,400	-	200	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘17. 5. ~ ’18. 9. : 1구간(L=86m), 2구간(L=74m) 도로개설 완료

○ ‘19. 6. ~ ’20. 7.(현재) : 3구간(L=180m) 도로개설 추진

□ 향후계획

○ ‘20. 7. : 3구간 도로개설 완료

○ ‘20. 8. ~ ‘20. 10. : 4구간(L=180m) 도로개설 완료

□ 사업변경 내역

사업규모	총사업비	사업기간	비고
L=520m, B=8~12m	4,900백만원	2016 ~ 2019
변동없음	4,100백만원	2016 ~ 2020

사업명

국립호남권생물자원관 건립

담당자

환경보호과 서연우(☎270-8542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서‧연안 생물자원 발굴‧연구‧전시‧교육을 하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2019년

○ 위 치 : 목포시 달동 1357번지(고하도 유원지내)

○ 규 모 : 부지 94,851㎡(28,692평)

건축연면적 9,870㎡(2,986평, 지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	49,300	20,500	28,800	-	-
국 비	43,200	14,400	28,800	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,100	6,100	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 2019.12월 준공

□ 향후계획

○ ‘20.9월 ~ 12월 중 개관예정(환경부)

사업명

유달산 주차장 조성

담당자

관광과 김승규(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 해상케이블카 및 고하도를 방문하는 지역주민과 관광객을 위한 기반시설(주차장) 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 목포 죽교동 519-9일원

○ 규 모 : 주차장 조성(A24,892㎡), 주차대수 453대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,400	4,340	1,060	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	2,083	509	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,800	2,257	551	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  3. : 투자심사 완료

○ 2017.  9. : 실시계획 인가고시 및 착공

○ 2019. 10. : 사업준공

사업명

고하도 목화(육지면)단지 조성사업

담당자

공원녹지과 이종희(☎270-3636)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고하도 목화(육지면) 최초 재배지에 목화체험전시관을 조성해 지역 향토       산업으로 육성하여 목포 해상케이블카, 국립호남권 생물자원관, 고하도 역사      유적공원 조성사업, 고하도 용오름길 등과 연계한 관광상품으로 개발

○ 지역민의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하고 시대적 상황에 맞는

친환경 힐링 사업으로 부가가치가 높음.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018 ~ 2021

○ 위 치 : 고하도 일원

○ 규 모 : 목화정원 조성 28,100㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,400	-	2,700	500	3,200
국 비	1,350	-	1,350	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,050	-	1,350	500	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 목화체험장 조성사업 완료

□ 향후계획

○ ‘20. 8월 어린이놀이시설 설치사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 목화체험장 조성지 변경 : 당초)충무분교(달동 800-8) ⇒ 현재)목화정원 내(달동 1332일원)

○ ‘17~’18 LM-목화발견으로 목화 재배면적 확대에 어려움이 있어 현) 목화정원 내 목화 식재 (고하도 내 토지보상 면적 축소)

사업명

목포 해식애 해안길 조성사업

담당자

관광과 김승규(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 관광자원인 고하도 해식애를 활용한 관광시설 구축 사업으로 고하도 내 주요 관광시설과 연계를 통한 관광시너지 효과 유발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021년

○ 위 치 : 목포시 고하도 해안 일원

○ 규 모 : 해안 데크로드 설치(L=738m B=2m), 광장 2개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,900	-	-	3,900	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,950	-	-	1,950	-
시군구비	1,950	-	-	1,950	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2017. 7. : 투자심사 완료

○ 2020. 1. ~ 4. : 실시설계 및 행정절차 완료

○ 2020. 5. : 공사계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2021. 3. : 해식애 해안길 조성사업 완료

사업명

대성동 주민센터 주변 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 김기복(☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가톨릭 성지를 찾는 관광객들에게 쾌적한 주차환경을 제공하고, 불법 주정차로 인한 가톨릭 성지 일원의 교통혼잡 해소를 위한 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월

○ 위 치 : 노송길17번길 18-1 일원

○ 규 모 : 2,462㎡(744평) / 56면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원(국1,100/시1,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,200	-	1,130	1,070	-
국 비	1,100	-	540	560	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,100	-	590	510	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  52%)

○ ‘17.  7월 : 지장재정 투자사업 자체심사 완료

○ ‘19.  4월 : 실시계획인가 고시

○ ‘19.  5월 : 보상계획 열람 공고 및 보상 추진

○ ‘19. 12월 : 실시계획 변경 고시

○ ‘20.  6월 : 지장물 철거공사 추진

□ 향후계획

○ ‘20.  7월 : 공사 착공

○ ‘20. 10월 : 공사 준공

사업명

2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역

담당자

교통행정과 임용순(☎270-8294)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포시 교통운영을 최적화, 자동화하고, 여행자에게 교통정보를 제공함        으로써 교통체계의 이동성, 안전성, 편의성를 높이고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 2. 1. ~ 2019. 7. 31.

○ 위 치 : 고하대로, 백련대로, 영산로, 통일대로 등 25.9㎞

○ 규 모 :  교통관제CCTV 6식, 도로전광표지(VDS) 4식, 교차로감시카메라 16식,

교통량수집시스템(VDS) 11식, 센터시스템 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	2,000	-	-
국 비	800	-	800	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	1,200	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ ‘19. 2. 7. : 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역 착공

○ ‘19. 2. 7. : 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역 착공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

목포 문화재 야행

담당자

도시문화재과 이연주(061-270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대문화재가 밀집된 공간에서 목포만의 특색을 살린 야간문화 향유프로그램을 기획·운영하여 도시브랜드 육성 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. 20. ~ 9. 22.  / 2019. 10. 26.

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원

○ 규 모 : 문화재 활용 프로그램 2회(총 4일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	360	-	360	-	-
국 비	180	-	180	-	-
시 도 비	54	-	54	-	-
시군구비	126	-	126	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019 목포문화재 야행 1회차 행사 실시 : 2019. 9. 20. ~ 9. 22.

○ 2019 목포문화재 야행 2회차 행사 실시 : 2019. 10. 26.

□ 향후계획

○ 2021 문화재야행 사업 공모 신청 : 2020. 8. 4.

○ 2020 목포문화재 야행 사업 실시 : 2020. 9. 18. ~ 9. 20.

사업명

목포국제축구센터 인조구장 잔디교체

담당자

교육체육과  박시은(☎270-3562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2009년에 조성한 목포국제축구센터의 인조구장 잔디의 내구연한(7년)이 경과되어 이용객들의 부상이 속출하고, 정상적인 훈련 등에 많은 지장을 주고 있어 이를 교체하여 안전한 체육활동 여건을 개선하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 내화마을길89(대양동), 목포국제축구센터

○ 규 모 : 인조구장 6개소(축구장4, 하키구장 1, 풋살구장 1) 잔디교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,400	1,333	-	2,067	-
국 비	1,020	400	-	620	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,380	933	-	1,447	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 인조(A, B)구장 잔디교체 완료                     : ‘18. 5.

○ 인조C구장, 풋살구장 잔디교체 완료                : ‘20. 3.

○ 하키구장 인조잔디 구매설치 계약                  : ‘20. 5.

○ 하키구장 인조잔디 철거 및 폐기물 처리 완료       : ‘20. 6.

○ 인조D구장 인조잔디 구매설치 계약 및 분리회수 계약 : ‘20. 6. / ’20. 7

□ 향후계획

○ 인조D구장, 하키구장 인조잔디 교체 완료 : ‘20. 8.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경

구 분	당 초	현 재	비 고
사업량	인조구장 5개소 (축구 4, 하키 1)	인조구장 6개소 (축구 4, 하키 1, 풋살 1)	‘19.1.변경승인

사업명

유달산남도명품 관광지 조성사업

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-8374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역을 대표하는 관광명소로 “목포해상케이블카” 개통에 따른 내ㆍ외국인 관광객 증가에 대비 70∼80년대 조성된 관광지의 노후화된 편익시설 개선, 안전하고 볼거리가 있는 탐방로 개설을 통하여 관광객에게 편의공간을 제공 관광시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019

○ 위 치 : 유달산공원 일원

○ 규 모 : 1,247천㎡, 탐방로 조성 2km,

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,700	846	1,854	-	-
국 비	1,350	420	930	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,350	426	924	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 유달산 남도명품 관광지 조성사업 완료

사업명

목포항구축제

담당자

관광과 정보현(☎270-8441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국을 대표하는 항구축제로서 목포만의 차별화된 축제 프로그램 운영을 통해 지역경제 활성화에 기여하고, 가을관광주간에 관광객 유치를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 4(금) ~ 10. 7(월) / 4일간

○ 위 치 : 포항 및 삼학도 일원

○ 규 모 : 주차장 조성(A17,429㎡), 주차대수 395대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 615백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	615	-	615	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	30	-	30	-	-
시군구비	585	-	585	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년 목포항구축제 개최 완료

【대표프로그램】신명나는 파시마당(8개), 맛의도시 “목포 9미 대첩”(6개),

갯가풍어길놀이 “천년의 사랑”

【공연 및 경연 프로그램】낭만항구 EDM 파티 등 16개 프로그램

【체험 및 전시 프로그램】낭만요트 해맑은호 등 20개 프로그램

【부대 프로그램】바다 그림그리기 대회 등 6개 프로그램

□ 향후계획

○ 다양한 볼거리와 체험거리 운영으로 대한민국 대표축제로 자리매김

사업명

목포 종합경기장 건립

담당자

교육체육과 박치현(☎270-8323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설노후(30년 경과)로 활용도가 낮아진 유달경기장을 대체하고, 2023년 제104회 전국체육대회 개최를 위한 종합경기장 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2022. 7.

○ 위 치 : 목포시 대양동 산 124번지 일원

○ 규 모 : 건축면적 17,480㎡, 연면적 26,468㎡, 지상 3층(관람석 16,464석)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 920,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	92,000	400	14,344	22,656	54,600
국 비	20,000	-	-	8,000	12,000
시 도 비	23,000	-	2,975	10,025	10,000
시군구비	49,000	400	11,369	4,631	32,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 토목공사 착공 : 2019. 12. 09.

○ 토목공사(암 발파) 추진 : 2020. 2. 20. ~

□ 향후계획

○ 건축 공사 본계약 및 공사 추진 : ‘20. 8. ~ ’22. 5.

○ 시험운전 추진 : ‘22. 6. ~ 9.

○ 사전 육상경기 및 전국체전 개최 : ‘23. 5. ~ / ’23. 10. ~

사업명

맛의 도시 목포 선포식

담당자

관광과 박세원(☎270-3512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포는 비옥한 남도의 농산물과 신선한 서남해권의 수산물이 만난 맛의 고장으로

맛의 도시 선포식을 통해 남도 맛의 1번지 명성 회복

○ 맛 페스티벌을 통하여 지역의 음식문화의 다양성·우수성을 널리 알리고, 음식 관광       산업 발전과 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. 12.(금) 11:00 ~ 13:00

○ 위 치 : 63빌딩 컨벤션센터 그랜드볼룸 (서울 여의도 소재)

○ 규 모 : 500여명 참석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	180	-	180	-	-
국 비	90	-	90	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	90	-	90	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 목포음식을 대외적으로 선보이는 프로그램 진행

- 맛의도시 목포 비전 선포

- 전문 셰프의 목포 음식 조리 시연

- 목포음식을 활용한 정찬 코스

○ 음식관광 활성화를 위한 관광설명회

□ 향후계획

○ ‘맛의도시’ 브랜드 대외적 선포를 통한 도시 가치 향상

○ 음식관광을 위한 도시브랜드 제고 홍보

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 축소 : 사업비 변경(280백만원 -> 180백만원)

- 사유 : 실외행사(당초) -> 실내행사(변경)

사업명

달리도항·어망촌항 슬로우 아일랜드 조성사업

담당자

해양항만과 백무황(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12

○ 위 치 : 목포시 달동 일원 (달리도 ‧ 외달도)

○ 규 모 : 공통사업(어촌‧어항현대화사업) 1식, 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,637백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,637	-	750	9,361	2,526
국 비	8,846	-	706	6,371	1,769
시 도 비	1,137	-	-	879	258
시군구비	2,654	-	44	2,111	499

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ '18. 12. 24 : 대상지 선정 발표(해양수산부)

○ '19.  4.  9 : 기본 및 시행계획수립 용역 착수(명소 황길식)

○ '19.  4. 15 : 달리도항 선착장 정비사업(공통사업) 설계용역 착수

○ '19.  5.  9 : 어촌뉴딜300사업 전국 8대 선도지구 선정

○ '19.  5. 27 : 어망촌항 선착장 정비사업(공통사업) 설계용역 착수

○ '19. 12. 26 : 공통사업 (달리도항 정비사업) 착공

□ 향후계획

○ '20.  8월 : 달리항 선착장 정비사업 등 공통사업 준공

○ '20.  9월 : 외달도 바다자연정원 조성사업 등 특화사업 추진

○ ‘21. 12월 : 외달도 바다자연정원 조성 등 특화사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 어촌뉴딜300사업 8대 선도지구 선정으로 인한 국비 인센티브로 총사업비 및 신규 사업계획 확정

○ 사 업 비 : (당초) 12,637백만원 → (변경) 13,436백만원 (증 799백만원)

○ 사업계획 : (신규) 달리1구, 2구 마을회관 리모델링

※ 마을회관 리모델링 A= 162㎡

사업명

목포 반다비 체육센터

담당자

교육체육과 노우균(☎270-3677)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제42회 전국장애인체전 개최와 더불어 장애인의 건강증진 및 재활을 위해

체육시설을 이용하여 생활체육 서비스 사각지대 해소 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 대양동 산124번지 일원(목포 종합경기장 건립 부지 내)

○ 규 모 : 지상2층, 연면적 3,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000	-	-	354	7,646
국 비	4,000	-	-	177	3,823
시군구비	4,000	-	-	177	3,823

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 전라남도 지방재정투자심사 조건부 승인                      : ‘19.  6.

○ 목포시 용역과제 사전심의 조건부 승인                       : ‘19. 11.

○ 국가공공건축지원센터 사전검토 신청                         : ‘20.  2.

○ 전라남도 설계용역계약심사 완료                             : ‘20.  2.

○ 목포시 설계용역계약심사 완료                               : ‘20.  2.

○ 국가공공건축지원센터 사전검토 회신                         : ‘20.  3.

○ 건축심의위원회 완료                                        : ‘20.  3.

○ 설계용역공모 완료                                          : ‘20.  6.

□ 향후계획

○ 건축설계공모적격자 선정 후 계약 체결                        : ‘20. 7.

○ 건축 실시설계 진행                                     : ‘20. 7. ~ 9.

○ 전라남도 공사용역 계약심사 및 건설기술심의 진행             : ‘20. 9.

○ 공사발주 및 계약                                     : ‘20. 11. ~ 12.

사업명

고하 만남의 생태공원 조성사업

담당자

관광과 조형근(☎270-8217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포시 주요 관광인프라 구축사업인 “목포해상케이블카 설치사업과 목화단지 조성사업”을 연계하여 가족형 광장을 조성하여 관광객에게 편의공간을 제공함으로써 관광시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ∼ 2021년 12월(24개월)

○ 위 치 : 목포시 달동 932번지 일원

○ 규 모 : 광장조성(A=5,848㎡)

∙ 분수, 광장바닥(트릭아트), 쉼터, 야외소무대, 조경, 전기 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,800	-	-	200	3,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,,500	-	-	100	1,400
시군구비	2,300	-	-	100	2,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘19.  9. : 2020 ~ 2024년 중기지방재정계획 수립

○ ‘19. 11. : 2020년 균특회계 지방이양(전환)사업 확정

○ ‘20.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘21.  1. : 고하 만남의 생태공원 착공

사업명

목포 유달산 봄 축제

담당자

관광과 박정현(☎270-8442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유달산 및 원도심 일원 축제개최를 통해 목포의 자연경관과 관광              자원을 널리 알리고 지역 이미지 제고 및 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.4.6. ~ 4.20. (기간 중 5일간 / 4.6.~4.7., 4.13.~4.14., 4.20.)

○ 위 치 : 유달산 및 원도심 일원

○ 규 모 : 대표프로그램 3종, 문화예술공연프로그램, 각종 체험프로그램 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	190	-	190	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	190	-	190	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019 목포 유달산 봄 축제 추진완료 : 2019.4.20.

○ 2019 목포 유달산 봄 축제 결과보고 : 2019.5.28.

□ 향후계획

○ 축제추진위원회 회의 개최

○ 향후 유달산 봄 축제 추진방향 수립 및 성공적 개최

사업명

목포근대문화사실 안전한보행환경개선사업

담당자

건설과 김태성(☎270-3338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차 통행 억제, 교통약자 배려, 보행위험요소 제거 등을 통해 보행자

중심의 안전하고 쾌적한 보행공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 목포시 유달동, 만호동 일원

○ 규 모 : 보행길 정비 2.1km, 안전편의시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,200	-	42	623	1,535
국 비	1,000	-	-	300	700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	42	323	835

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘19. 5. ~ ’20. 3. : 실시설계 및 주민 설명회

○ ‘20. 5.          : 1차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020 : 1차분 사업 완료

○ 2021 : 2차분(최종) 사업 완료

사업명

(구)목포경찰서부지 및 건물취득, 처분

담당자

회계과 문명희(☎061-270-3273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 구)목포경찰서 주변 침체 된 상권 및 지역경제 활성화하기 위해

전라남도 3개 공공기관 구)목포경찰서 부지로 이전 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 10월 ∼ 2020년 12월 (1년 4개월)

○ 위 치 : 전남 목포시 용해동 354번지 일원

○ 규 모

- 매입 : 전남 목포시 용해동 354번지 외 5필지 ✽소유자 (국)기획재정부

(토지 : 6,407㎡, 건물 : 8개동 6,675.92㎡)

- 처분(철거) : 건물 8개동 중 7개동 6,201.33㎡ ✽철거대상 : 안전진단 결과 D등급

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,988백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,988	-	-	4,988	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,988	-	-	4,988	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2019. 5월 : 전남도 공공기관(3개) 이전 유치 확정

○ 2019. 12월 : 시의회 공유재산관리계획(매입) 승인 및 예산 확보(56억)

○ 2020. 1월~3월 : 국유재산 매각요청 및 승인(기획재정부 ↔ 목포시)

○ 2020. 4월 : (구)목포경찰서 매입완료

□ 향후계획

○ 20. 5월~8월 : 건축물 철거(시 건축행정과, D등급 7개동)

○ 2020. 9월 이후 : 전남도 공공기관별 토지 분할 및 매각

〈시→ 법무부(스마일센터), 전남도(통일센터, 청소년지원센터)〉

○ 20. 9월 이후 : 건물 신축 등 추진(전남도)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 투자심사의뢰 63억원에서 ’20년도예산 56억원 반영→매입완료 49.8억원

사업명

유달동 대반마을 도시취약지역

생활여건 개조사업(새뜰마을사업)

담당자

도시재생과 강찬승 (☎270-3649)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시취약 지역의 열악한 기초생활인프라 정비, 주거환경 개선 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 유달산 일주도로 주변(공생원 인근, 대반마을)

○ 규 모 : A=38,483㎡(5개 분야, 19개 세부사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,538백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,538	-	-	800	3,738
국 비	3,177	-	-	560	2,617
시 도 비	408	-	-	72	336
시군구비	953	-	-	168	785

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘19. 04. : 공모사업 대상지 선정

○ ‘19. 09. : 목포시 지방재정 투자심사 완료

○ ‘19. 10. : 총괄코디네이터 국토교통부 위촉

○ ‘19. 11. : 지적불부합에 따른 지적 재조사 사업 진행

○ ‘20. 05. : 마스터플랜 수립 용역 진행

□ 향후계획

○ ‘20. 07. ~ : 협의보상 및 공폐가 철거공사 추진

○ ‘20. 10. ~ : 마스터플랜 수립(안) 승인 요청 (국토교통부)

○ ‘20. 11. ~ : 실시설계 용역 발주 및 세부사업 추진

10-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
대양산단 미분양용지 매입	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

대양산단 미분양 용지 매입

담당자

기업유치과 김동훈 (☎061-270-8133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대양일반산업단지 내 미분양 용지 매입으로 목포시 부담이자 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2027년

○ 위 치 : 목포시 대양동 1180-3번지 외 41필지

○ 규 모 : 295,474.4㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 79,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	79,980	-	79,980	-	-
지 방 채	79,980	-	79,980	-	-
국 비		-	-	-	-
시 도 비		-	-	-	-
시군구비		-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 08. : 지방채 발행 승인 신청

○ ‘18. 11. : 지방채 발행 승인(행정안전부)

○ ‘18. 12. : 2019년 지역개발기금 융자 결정 통보(전라남도)

○ ‘19. 03 : 제346회 목포시의회 임시회 지방채 발행 승인

○ ‘19. 06. : 미분양 용지 매입(295,474.4㎡, 79,980백만원)

□ 향후계획

○ 매입 용지 분양 및 지방채 상환

- 공공자금(지역개발기금) 500억원 3년 거치 5년 균등상환(연 2.0%)

- 민간자금(기업은행) 300억원 5년 거치 만기 일시상환(연 1.896%)

10-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL	2005 BTL	푸른목포환경(주)	102,509	46,862	4,870	4,898	45,878	‘10.4.~’30.4.
	2006 BTL	맑은목포환경(주)	138,419	50,006	6,680	6,704	75,029	‘12.1.~’32.1.
	2009 BTL	청정목포환경(주)	68,053	18,029	3,277	3,318	43,429	‘13.10.~’33.10.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

2005년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수과 김선웅(☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해･북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 6. ~ 2010. 4.

○ 위    치 : 용당동, 연동, 산정동, 목원동, 동명동, 삼학동 일원

○ 민간사업자 : 푸른목포환경(주)

○ 총사업비 :  502.9억원

○ 사업규모 : 관거정비 L=63.3km, 배수설비 3,204개소, 내항펌프장 1동

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	102,509	46,862	4,870	4,898	45,879
국 비	64,700	29,901	3,086	3,086	28,627
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	37,809	16,961	1,784	1,812	17,252
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중(운영기간 : 2010. 4. ~ 2030. 4.)

□ 향후계획

○ 매 분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ ‘09. 12. 09. : 준공지표(I/I → QA/QC) 및 운영평가지표 변경에 따른 사업비 및 운영비 조정

사업명

2006년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수과 김선웅(☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해･북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 8. ~ 2012. 1.

○ 위    치 : 용당1·2동, 용해동, 연동, 산정동, 삼학동, 상동, 북항동 일원

○ 민간사업자 : 맑은목포환경(주)

○ 총사업비 :  659.35억원

○ 사업규모 : 관거정비 L=49.8km, 배수설비 705개소, 용당우수저류조 1개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	138,419	50,006	6,680	6,704	75,029
국 비	87,253	31,929	4,237	4,237	46,850
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	51,166	18,077	2,443	2,467	28,179
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중(운영기간 : 2012. 1. ~ 2032. 1.)

□ 향후계획

○ 매 분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

사업명

2009년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수과 김선웅(☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해･북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 2. ~ 2013. 10.

○ 위    치 : 북항동, 연산동, 원산동, 산정동 일원

○ 민간사업자 : 청정목포환경(주)

○ 총사업비 :  324.5억원

○ 사업규모 : 관거정비 L=19.3km, 배수설비 1,039개소, 우수박스 678m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	68,053	18,029	3,277	3,318	43,429
국 비	4,487	10,995	1,994	1,994	25,505
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	27,565	7,034	1,283	1,324	17,924
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중(운영기간 : 2013. 10. ~ 2033. 10.)

□ 향후계획

○ 매 분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급