□ 주요 투자사업 추진현황

우리 목포시에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만 원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
노벨평화공원 삼학도 테마경관사업	3,400	472	1,260	268	1,400	2026년	2018년	50%
목포 해변맛길 30리 조성	10,000	6,554	1,106	864	1,476	2025년	2019년	80%
유달동 대반마을 도시취약지역 생활여건 개조사업 (새뜰마을사업)	4,386	2,782	1,009	1,623	-	2025년	2019년	60%
수산식품수출단지조성	113,706	12,521	25,905	49,081	26,199	2026년	2019년	50%
서산·온금 재정비촉진지구 기반시설조성	39,477	17,815	2,561	2,800	18,862	2027년	2020년	45%
미세먼지 차단 숲 조성	5,000	4,626	374			2024년	2020년	100%
전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발	43,000	39,900	3,100	-	-	2025년	2020년	100%
삼학도 천년의 숲 산림공원 조성	2,000	1,100	800			2024년	2020년	100%
목포 어묵 세계화 기반구축 및 육성전략	10,800	2,325	2,001	6,470	-	2025년	2020년	95%
구 목포세관 문화유산권역 관광활성화 사업	5,000	1,098	1,101	2,801	-	2025년	2020년	44%
관광거점도시 육 성 사 업	87,199	39,120	8,030	22,761	17,288	2025년	2020년	54%
율도 어촌뉴딜300사업	12,342	10,010	1,376	957	-	2025년	2020년	95

(단위 : 백만 원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
죽교동 샘골마을 취약지역 생활여건 개조사업	4,473	2,482	761	554	-	2025년	2021년	50%
갓바위 지방정원 조성	8,000	185	362	1,493	5,960	2027년	2021년	10%
목포시 스마트 관망관리 인프라 구축사업	3,448	2,686	762	-	-	2024년	2021년	100%
서남권뮤지엄페어	700	500	200	-	-	2024년	2021년	100%
긴급치료병상 증축공사	5,800	338	4,623	838	-	2025년	2022년	90%
문화도시 조성사업	15,000	5,657	2,697	3,000	3,000	2026년	2022년	60%
목포 문화재 야행	325		305	-	-		2022년	100%
목포시 공용주차장 주차타워 건립사업	5,850		5,850	-	-	2024년	2022년	100%
춤추는 바다분수 시설 기능개선 사업	8,506	-	8,505	-	-	2024년	2022년	99.9%
목포 실내체육관~ 삼향동주민센터간 위험도로 구조개선	9,000	96	84	3,000	5,800	2028년	2023년	30%
목포 세라믹산단 기반시설 확충	1,070	143	27	900	-	2025년	2023년	35%
유통단계 위생안전체계 구축사업	6,180	150	6,030	-	-	2025년	2023년	100%
목포시장애인 종합복지관 별관 증축사업	4,500	-	350	4,150	-	2026년	2023년	40%
양을산 산림욕장~ 실내체육관 간 도로개설 공사	9,000	90	64	-	8,844	2029년	2023년	10%

(단위 : 백만 원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
용당1지구 취약지역 생활여건 개조사업(도시)	4,190	226	192	300	3,698	2027년	2023년	10%
목포시 기독교 근대역사관 건립 사업	8,400	21	300	4,300	3,779	2026년	2023년	20%
노벨평화상기념관 경관 개선 사업	10,000	-	-	-	10,000	2028년	2023년	5%
목포 오감힐링골목길 문학마을 조성사업	14,460	-	-	2,800	11,660	2027년	2023년	10%
2024 코리아오픈 배드민턴 선수권대회	980	-	980	-	-	2024년	2023년	100%
나전칠기 공예품 기증 특별전 개최	280	138	58	-	-	2024년	2023년	100%
구 목포세관 실감 미디어 콘텐츠 제작 및 설치사업	2,250	1,580	666	-	-	2024년	2023년	100%
외달도 가고싶은섬 가꾸기 사업	5,000	246	146	605	4,003	2027년	2023년	20%
목포마리나 시설정비사업	2,800	-	146	804	1,850	2026년	2023년	30%
목포형 대중교통 시스템 구축사업	30,834	-	22,627	5,265	2,942	2026년	2024년	90%
목포권 통합바이오가스화시설 건립사업	70,299	-	80	300	69,919	2030년	2024년	0.5%
대삼학도 무장애나눔길 조성	2,500	-	51	34	2,415	2026년	2024년	10%
친환경선박용 암모니아 연료공급장치 및 시스템 실증기반 구축	20,000	-	1,700	6,900	11,400	2028년	2024년	20%

(단위 : 백만 원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
석현뜰 유수지 진입도로 개설공사	5,400	-	35	500	4,860	2028년	2024년	15%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2024년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 [별지7] 참고

우리 목포시에서 ‘24년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

(단위 : 백만 원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
목포형 대중교통시스템 구축사업	30,834	30,000	-	-	834	-	30,000	90%
공원 및 녹지 부지 매입	41,700	20,000	-	-	21,700	-	20,000	33.3%
1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	22,658	3,000	2,457	5	-	17,196	3,000	65%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2024년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 [별지8] 참고

우리 목포시에서 ‘24년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 3 민간투자사업

(단위 : 백만 원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2024년	2025년	2026년 이후
총 계			311,566	188,962	15,249	15,346	91,556
BTL	05 하수관거 정비사업	푸른목포환경(주)	100,992	70,781	4,788	4,796	20,621	‘10.4. ~ ’30.4.
	06 하수관거 정비사업	맑은목포환경(주)	139,955	83,749	6,885	6,922	42,249	‘12.1. ~ ’32.1.
	09 하수관거 정비사업	청정목포환경(주)	70,619	34,432	3,576	3,628	28,686	‘13.10. ~ ’33.10.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2024년까지는 집행액(결산기준),
2025년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황[별지9] 참고