11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
목포시 종합장사 시설 건립	32,976	3,201	5,751	24,024	2015	2009	부지조성 100% 건축착공 10%
고하도유원지조성	18,340	10,100	3,157	5,083	2017	2006	72%
오성식품도축장이전	4,188	1,000	1,200	1,988	2015	2011	60%
수산식품지원센터 건립	22,244	14,614	4,221	3,409	2014	2006	80%
대박마을주변 도로개설	8,105	3,700	600	3,805	2015	2006	55%
철도폐선부지 웰빙공원 조성	26,500	14,620	3,360	8,520	2015	2006	85%
서남방송국～ 본옥동간 도로개설	12,674	7,370	2,300	3,004	2015	2010	85%
산정2동사무소건너편 ∼구 가톨릭병원간 도로개설	3,475	550	1,800	1,125	2014	2010	80%
도심관통도로개설	35,600	5,600	800	29,200	2020	2005	20%
상점가시설현대화 주차장 조성	3,500	1,503	580	1,417	2015	2007	70%
서남권수산물유통센터 진입도로 확장	3,600	2,125	875	600	2014	2010	85%
역사문화의길 조성	19,000	6,400	1,800	10,800	2015	2004	40%
삼학도 복원화 공원조성사업	139,921	108,954	8,764	22,203	2016	2002	70%
노벨평화상 기념관 건립	20,000	8,000	12,000	-	2013	2011	100%
상동초기우수처리시설 설치사업	15,609	523	7,222	7,864	2015	2009	85%
대양이로하수처리분구연계처리시설	9,681	795	4,124	4,762	2015	2010	42%
북항공공하수처리 고도처리설시사업	7,944	279	213	7,452	2016	2010	15%
용해2지구~백련펌프장 하수관거정비사업	18,550	-	215	18,335	2016	2011	5%
남악신도시 하수 처리장 증설사업	20,147	-	386	19,761	2016	2013	10%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여   2013년에 추진한 사업은 총 19건입니다.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

목포시 종합장사시설 건립

담당자

노인장애인과

윤주명(☎270-8862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재래식 화장장 이전 숙원사업 해결과 장례문화 확산에 대처하고자

민․관 공동으로 장사시설을 건립하여 One-Stop 장례서비스 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : ‘10. 5 ~ ’15. 6

○ 위  치 : 목포시 대양동 764-11번지 일원

○ 규  모 : 총 연면적 13,831㎡ (목포시 4,165㎡ . 민간 9,666㎡)

• 목포시 : 화장장, 봉안당, LPG저장소 / 민간 : 장례식장, 봉안당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,976백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	32,976	3,201	4,667	12,553	12,555
국 비	5,721	-	-	2,860	2,861
시 도 비	642	-	-	321	321
시군구비	6,613	251	517	2,922	2,923
민간자본	20,000	2,950	4,150	6,450	6,450

□ 추진상황

○ 부지조성 토목공사 100% : ‘13.1 ~ ‘14.5

○ 민․관 건축공사 착공 10% : ‘14. 6

□ 향후계획

○ 민․관 장사시설 건립사업 준공 : ‘15. 4

○ 장사시설 시험운영 및 가동 : ‘14. 5~ 6

□ 사업변경 내역                                    (단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	사업기간	비 고
당 초	부지 50천㎡ 연면적 13,715㎡	29,400	‘10 ~ ’11
현 재	부지 61천㎡ 연면적 13,831㎡	32,976	‘10 ~ ’15	민간자본 증

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

고하도유원지 조성공사

담당자

관광과 박재홍(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연조건과 이충무공 유적지가 있는 고하도를 친환경적 체류형

국제 관광지로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2005 ~ 2017

○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원

○ 규 모 : 2,209천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,340백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	18,340	10,100	3,157	1,000	4,083
국 비	9,170	6,450	1,039	-	1,681
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,170	3,650	2,118	1,000	2,402
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)

○ ‘05     : 중기지방재정계획 반영

○ ‘06.  4 : 지방재정 투융자 심사(중앙)

○ ‘07. 10 : 조성계획 및 실시설계용역

○ ‘07.  4 : 도시계획시설(유원지) 변경 결정 (1,851천㎡ → 2,209천㎡)

○ ‘08.  6 : 실시계획 인가고시

○ ‘08.  8 : 공사착공(도로 및 기반시설)

□ 향후계획

○ ‘14. 12 : 도로공사 및 기반시설공사 완료

○ ‘15 ~ ’17 : 공공부문 토지보상 및 공사추진

□ 사업변경 내역

○ 사업면적 : 당초 1,851천㎡ ⇒ 변경 2,209천㎡ (도시계획시설 면적 변경)

○ 사 업 비 : 당초 472억원   ⇒ 변경 183억원 (국비 사업비 조정)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

오성식품 도축장이전 사업

담당자

농상과 김대승(☎270-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 악취와 소음 등으로 주거환경을 저해하는 목포도축장을 기한 내에 조기

이전 완료될 수 있도록 행정지원 및 원활한 사업추진 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 5. ~ 2015. 5

○ 위    치 : 목포시 대양동 산82-6번지 일원

○ 총사업비 : 4,188백만원 (전액시비)

○ 사업내용 : 13,535㎡(대지면적 9,970㎡, 연면적 5,245.9㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,188백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,188	1,000	1,200	1,088	900
국 비
시 도 비
시군구비	4,1800	1,000	1,200	1,088	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘12. 4~5월      도축장 이전사업 협약 및 양도･양수 계약 체결

○ ‘13.  12월      이전부지 도시관리계획 결정 고시

○ ‘14.   5월     도시계획시설(도축장) 사업시행자 지정 및 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ ‘14.   7월     신축 도축장 착공

○ ‘15.   5월     신축 도축장 준공 및 이전

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간  당초 : 2012년 ~ 2014년까지

변경 : 2012년 ~ 2015. 5월까지

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

목포수산식품지원센터 건립

담당자

해양수산과

강복주(☎270-3647)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남해안의 풍부한 수산자원을 활용한 고부가 가치의 수산식품 개발과 브랜드화, 기술이전 및 창업지원을 통해 지역 신 성장 동력사업으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010~2014

○ 위 치 : 목포시 고하대로 719번길 52(연산동)

○ 규 모 : 부지 14,567㎡, 건축연면적 9,534㎡(연구동, 생산동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,244백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	22,244	14,614	4,221	3,409	-
국 비	11,122	7,307	2,111	1,704	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,122	7,307	2,110	1,705	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○  ‘10. 05월 ~ ‘12. 06월 : 공사시행(센터건립)

○ ‘12. 07월             : 전라남도 수산물안전성검사센터 입주

○  ‘13. 10월             : 재단법인 설립

○ ‘13. 11월 ~ ’14. 11월  : 연구 및 생산 장비 구축 완료

□ 향후계획

○ ‘14. 11월 : 센터개소

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

대박마을주변 도로개설

담당자

도시계획과정재홍(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 지역 기반시설 확충으로 지역 개발 활성화와 주민의 교통편익 제공       으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008. 4. ~ 2015. 5.

○ 위 치 : 대박마을주변

○ 규 모 : L=1,050m, B=10~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,105백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,105	3,700	600	100	3,705
국 비
시 도 비
시군구비	8,105	3,700	600	100	3,705
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ ‘06.  3. 29. : 투․융자 심사

○ ‘06. 10. 16. : 실시설계 완료

○ ‘08.  1. 25. : 실시계획 인가고시

○ ‘08.  4. ~ ’14. 03. : 1~7차분 공사 완료

- 거북정~아이엠로즈빌(L=510m, B=10~20m) 보조기층 포설 완료(1차~6차분)

- 마을입구~대박산식육식당(L=210m, B=20m) 표층 포장 완료(7차분)

□ 향후계획

○ 연차적으로 예산을 확보하여 도로개설 공사 추진

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

철도폐선부지 웰빙공원 조성

담당자

도시계획과김선웅(☎270-3447)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철도폐선부지를 웰빙공원으로 조성하여 시민편익 제공 및 건강증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. 7. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 연동광장 ~ 옥암동 임성리역 앞

○ 규 모 : 공원조성 L=6.2㎞, A=172,637㎡

마을안길 조성 5개 노선 L=4.1km, B=6~15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  26,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	26,500	14,620	3,360	5,510	3,010
국 비	10,000	4,360	1,830	3,810	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	16,500	10,260	1,530	1,700	3,010
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2013. 12. : 청호, 동목포, 송림, 이로공원 조성 완료(L=5.0㎞)

마을안길 2.5㎞ 완료

○ 2014.  6. : 석현공원(석현건널목~대성사랑으로) 조성중(L=0.5㎞)

동목포 마을안길 외 1개소(L=0.5㎞) 추진중

○ 2014.  8. : 석현공원(대성사랑으로~청호육교~삼향천간) 조성공사 발주

(L=664m, A=22,296㎡)

□ 향후계획

○ 2015. 12. : 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

구)서남방송국~본옥동간 도로개설

담당자

도시계획과 정재홍(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 북항권역과 신도심을 연결하는 도로를 개설하여 지역간 차량 소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007. 2. ~ 2015. 6.

○ 위 치 : 구)서남방송국 ~ 본옥동간

○ 규 모 : L=370m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,674백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,674	7,370	2,300	2,600	404
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,674	7,370	2,300	2,600	404
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ ‘06. 2. 27. : 실시설계 완료

○ ‘07. 1.  5. : 실시설계 인가고시

○ ‘07. 2 ~ ’14. 1 : 1 ~ 10차분 공사 완료

○ ‘14. 6.    : 보상완료(총100건), 토공 및 상․하수도, 옹벽, 육교, 기층포장, 낙석방지망 및 방지책 설치완료

□ 향후계획

○ ‘14.  7. ~ 10. : 표층포장 후 개통

○ ‘14. 10. ~ 12. : 방음벽 및 미끄럼방지포장

○ ‘14. 12. ~ ’15. 6. : 조경, 절개지 보강 및 기타 부대시설 보완

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

산정2동사무소 건너편∼

구 가톨릭병원간 도로개설

담당자

건설방재과 정봉채(☎3484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획사업 추진으로 민원해소 및 지역균형 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2005~2014

○ 위 치 : 산정동 구 가톨릭병원 주변

○ 규 모 : L=220m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,475백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,475	550	1,800	1,125	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,475	550	1,800	1,125	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ '05.  9 : 실시설계용역 추진

○ ‘07.  3 : 실시계획 인가 고시

○ ‘13.  8 : 실시계획(변경) 인가 고시

○ ‘13.  9 : 지장물 및 토지보상 추진

○ ‘14.  2 : 건설기술심의 추진

○ ‘14.  4 : 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘ 14. 10 : 공사준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

도심관통 도로개설

담당자

원도심사업과

이인정(☎270-8329)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장~목여고 교차로간 도심관통  도로를 개설하여 접근성 향상 및 도심 순환교통체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2016

○ 위 치 : 구)중앙공설시장 ~ 7호광장 간

○ 규 모 : 도로개설 L=555m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,910 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	35,600	5,600	800	1,710	27,490
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	35,600	5,600	800	1,710	27,490
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘08. 09. : 도시계획시설사업(중로1-70) 실시계획인가고시(L=165m)

○ ‘10. 01. ~ 10. 12. : 1차구간(L=89m) 보상 및 지장물철거 완료

○ ‘13. 10. : 도시계획사업 실시계획 변경인가고시

(편입면적 정정, 사업기간변경 14년⇒16년)

○ ‘13. 10. ~ 14. 07. : 2차구간 토지등 소유자 1차 ,2차 분할보상금 지급(70%)

□ 향후계획

○ ‘14. 01. ~ : 2구간 3차보상 완료 및 철거, 1,2 구간(L=165m) 도로개설

○ ‘15. 01. ~ : 잔여구간 보상 및 도로개설

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비

- 당 초 : 33,910백만원,  변 경 : 35,600백만원

○ 사업비변경 사유 : 사업기간 연장에 따른 물가상승률 반영

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

상점기 시설현대화 주차장 조성

담당자

원도심사업과

이인정(☎270-8329)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심권 상가의 주차공간부족으로 인한 이용객 불편을 해소하고 접근성 개선을 통한 상점가 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2015

○ 위 치 : 죽동6거리 189번지 일원

○ 규 모 : 주차장조성 A=3,468㎡(주차대수 115면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,500	1,503	580	500	917
국 비	488	488	-	-	-
시 도 비	500	-	-	500	-
시군구비	2,512	1,015	580	-	917
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘08. 07. : 도시계획시설 결정 및 실시계획인가고시

○ ‘11. 08. : 1차 단계 주차장 조성완료(A=843㎡, 주차21면)

○ ‘13.  7. : 토지5필지, 지장물 보상(4동) 및 철거 완료(4동)

○ ‘14.  4. : 토지5필지, 지장물 4동 보상완료

□ 향후계획

○ ‘14.  8.~ 12. : 지장물 철거 추진(지장물 4동)

○ ‘15.  1.~ 12. : 잔여토지 및 지장물 보상 및 주차장조성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

서남권수산물유통센터 진입도로 확장

담당자

원도심사업과 서신우(☎270-3643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남권 수산물 유통센터 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 도모하고   이용객 편의를 위해 진입도로 확장 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011.3. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 수산물 유통센터 ~ 남초등학교 사거리

○ 규 모 : L=140m, B=20m(기존 8m→20m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,600	2,125	875	600	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	80	80	-	-	-
시군구비	3,520	2,045	875	600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2010. 11. 02. : 지방재정 투융자 재심사 (적정)

○ 2012.  3. 18.  : 목포도시계획시설사업(중로 1-66) 실시계획 인가고시

○ 2012. 2. ~ 2013. 12. : 보상 협의 및 철거공사 완료 (토지 20필지 및 건물 17동)

○ 2014. 1. ~ 2014. 6.  : 도로개설1차분 L=40m 도로개설(잔여구간 80m 가포장) 완료

□ 향후계획

○ 2014. 8. ~ 2015. 12 :  추경예산확보(600백만원) 및 도로개설2차분 발주(암반노출구간) 추진(L=80m) 및 완료

□ 사업변경 내역

구분	사업기간	사업내용 및 사업규모	총 사 업 비 (백만원)	증감내역	비 고
당초	2011. 3.~ 2013.12	도로확장 L=140m, B=20m (기존 8m→20m 확장)	4,700		2007.10.30 목포시 자체심사 투융자
1차	2011.3.~ 2014. 12	도로확장 L=140m, B=20m (기존 8m→20m 확장)	3,400	감 1,300백만원	2010.11.2 목포시 자체심사 투융자
2차	2011.3.~ 2014. 12	도로확장 L=140m, B=20m (기존 8m→20m 확장)	3,600	증 200백만원	2013.11 중기지방재정 계획반영

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

역사문화의길 조성사업

담당자

원도심사업과 박치현(☎270-3685)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원형이 보존 된 일제강점기의 건물, 도로 등 근대역사문화 자원을 역사의 산 교육장으로 복원, 문화 관광자원으로 적극 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007 ~ 2015

○ 위 치 : 목포시 유달 ․ 만호동, 남양 ․ 무안 ․ 북교동 일원

○ 규 모 : 면적 38,047㎡, 도로 5.41㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	19,000	6,400	1,800	400	10,400
국 비	9,500	4,225	900	-	4,375
시 도 비	63	63	-	-	-
시군구비	9437	2,112	900	400	6,025
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ‘02. 11. : “목포 역사문화의길” 조성 기본계획 수립

○ ‘11년 ~ ’12년 : 구)청년회관 리모델링, 구)일본영사관 주변 정비, 목포 근대역사문화예술공원 조성

○ ‘13. 05 : 유달예술타운 건립공사 착공(준공 14. 6. 09일)

□ 향후계획

○ ‘14. 08 : 유달예술타운 건립공사 준공(공원과 이관)

○ ‘14. 08 : 예산 확보 후 역사문화의길 조성사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

삼학도 복원화 공원 조성 공사

담당자

원도심사업과 김신주(☎270-3684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포의 상징인 삼학도의 옛모습을 찾고 친환경 생태공원으로 조성, 시민의 휴게 공간 제공 및 관광객 유치

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2000년 ~ 2016년

○ 위    치 : 산정동 삼학도 일원

○ 규    모 : 공원조성 574,850㎡, 호안수로 2.2km, 교량 10개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 139,921백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	139,921	108,954	8,764	4,000	18,203
국 비	48,675	32,975	2,300	3,000	10,400
시 도 비	3,594	3,594	-	-	-
시군구비	87,652	72,385	6,464	1,000	7,803
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘04. 12. : 삼학도 복원화사업 공원조성공사 착수

○ ‘11. ~ ’13년까지

- 호안수로 2.1km, 산책로 4.2km, 교량 9개소, 취배수갑문 3개소, 파크골프장, 구)한국제분공장부지 산형태복원 등

○ ‘14.  4.     : 삼학도 내 철도 선로 철거(380m)

□ 향후계획

○ ‘14. 8. ～ : 대흥수산부지 광장 및 주차장(5억), 교량 1개소(10억), 대공연장(7,200㎡, 8억), 조경(20,000㎡, 7억) 등

○ ‘15. ～’16년 : 연차별 사업추진[삼학부두(‘15년말 이전) 및 해경전용부지(’15년말 이전), 해변광장, 삼학도 입구주차장 조성 등]

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

노벨평화상기념관 건립

담당자

문화예술과 김용중

(☎270-3542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유서깊은 삼학도에 기념관을 건립하여 우리지역의 상징성을 높이고 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2013년

○ 위 치 : 목포시 삼학로 92번길 68

○ 규 모 : 부지 15,600㎡, 연면적 4,677㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	20,000	8,000	12,000	-	-
국 비	10,000	4,000	6,000	-	-
시 도 비	4,000	1,600	2,400	-	-
시군구비	6,000	2,400	3,600	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘11. 07월 : 실시설계용역 완료

○ ‘11. 09월 : 건립공사 착공

○ ‘12. 05월 : 연세대 김대중도서관과 업무협약체결

○ ‘12. 11월 : 전시관 전시물 4,830점 확보(유품 130점 포함)

○ ‘13. 03월 : 재단법인설립 운영조례 제정

○ ‘13. 05월 : 준공

○ ‘13. 06월 : 김대중노벨평화상기념관 개관

□ 향후계획

○ 김대중노벨평화상기념관 관리운영

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

상동초기우수처리시설 설치사업

담당자

하수과 강혜선(☎ 270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스

터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년

○ 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

○ 규 모 : 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수암거개량 125m, 조경시설물

철거 및 복구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  15,609백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	15,609	523	7,222	2,779	5,085
국 비	10,926	418	6,043	2,588	1,877
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,683	105	1,179	191	3,208
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ ‘10.  1. ~ ’13. 4 : 기본 및 실시설계용역 추진

○ ‘13.  4. 23 : 총괄 및 1차분 공사 착공

○ ‘13.  6. 24 : 2차분 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘14.  4. 22 ~ 6. 22 : 1·2차분 공사 준공

○ ‘14.  6. 23 : 3차분 공사 착공

○ ‘14.  7.  8 : 저류조 슬라브 콘크리트 타설 및 우수기대비 가배수로, 수문 설치

○ ‘14.  9 : 잔여분 공사 발주

○ ‘15. 12 : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

대양이로하수처리분구 연계처리시설

담당자

하수과 진헌민(☎ 270-8667)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계

처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년

○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원

○ 규 모 : 중계펌프장 2개소, 압송관 5.13km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,681백만원(국비 4,840, 도비 483, 시비 4,358)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	9,681	795	4,124	1,285	3,477
국 비	4,840	764	3,436	640	-
시 도 비	483	31	388	64	-
시군구비	4,358	-	300	581	3,477
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ ‘13.  3.  4 : 공사 착공

○ ‘13. 12. 27 : 이로펌프장 착공

□ 향후계획

○ ‘14.  5. 31 : 압송관로 부설 5.13km 중 3.5km 완료

○ ‘14.  7.  5 : 이로펌프장 기초파일 128본 항타 완료

○ ‘14.  8 : 압송관로 잔여구간(1.63km) 부설

○ ‘14. 10 : 대양중계펌프장 편입토지 보상

○ ‘15. 12 : 대양중계펌프장 설치 및 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

북항공공하수처리 고도처리설치사업

담당자

하수과 강혜선(☎ 270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북항 하수종말처리시설의 질소, 인 등 영양염류를 고도처리하여 방류수       수질기준 준수 및 공공수역 수질오염 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위 치 : 북항하수처리시설 내

○ 규 모 : 고도처리 Q=35,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,944백만원(국비 3,972, 도비 38, 시비 3,934)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,944	279	213	-	7,452
국 비	3,972	155	175	-	3,642
시 도 비	38	-	38	-	0
시군구비	3,934	124	-	-	3,810
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ ‘10.  5.  6 : 지방재정 투·융자 심사 완료(전라남도)

○ ‘12.  5. 21 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ ‘14.  2. 25 : 처리공법 1·2차평가 완료

○ ‘14.  6. 10 : 지방건설기술 심의

○ ‘14.  7.  9 : 설계자문(한국환경공단)

○ ‘14. 10 : 행정절차 이행(道 계약심의, 市 일상감사 등)

○ ‘14. 11 : 공공하수처리설치 및 도시계획시설(변경)인가

○ ‘15.  1 : 공사 착공

○ ‘16. 12 : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

용해2지구~백련펌프장 하수관거정비사업

담당자

하수과 진헌민(☎ 270-8667)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생하는 우수를 신속히 배제하여 침수       방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 용해2지구~백편펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 2련 우수박스(3.5×2.2m) L=1,580m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,550백만원(국비 12,985, 지방비 5,565)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	18,550	-	215	500	17,835
국 비	12,985	-	-	500	12,485
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,565	-	215	-	5,350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ ‘08. 12 : 목포시하수도정비기본계획(변경) 승인

○ ‘11. 10 : 지방재정투·융자 심사(전라남도)

□ 향후계획

○ ‘14.  1 : 국고보조사업 확정

○ ‘14.  3 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘14.  8 : 기본 및 실시설계 용역 중간 보고

○ ‘14. 11 : 기본 및 실시설계 용역 최종 보고

○ ‘15.  1 : 용역 완료 및 행정절차 이행

○ ‘15.  2 : 공사 착공

○ ‘16. 12 : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

남악신도시 하수처리장 증설사업

담당자

하수과 강혜선(☎ 270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도       증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 목포시 옥암동 산 66-1

○ 규 모 : 시설용량 10,000㎥/일 증설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,147백만원(목포시 8,810, 전남개발공사 11,337)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	20,147	-	386	4,000	15,761
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,810	-	-	1,749	7,061
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	11,337	-	386	2,251	8,700

□ 추진상황

○ ‘13.  3. 27 : 하수처리장 증설 협약 및 용역과제 사전심의

○ ‘13.  6.  6 : 기본 및 실시설계 용역착수

○ ‘13.  7. 31 : 道 투·융자심사 조건부 승인

○ ‘13.  8. 30 : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정

□ 향후계획

○ ‘14.  4. 14 : 처리공법 선정 완료

○ ‘14.  6. 26 : 지반 토질조사용역 착수

○ ‘14.  8 : 기본 및 실시설계 용역 최종 보고

○ ‘14.  9 : 행정절차 이행 및 용역완료

○ ‘14. 11 : 공사 착공

○ ‘16. 12 : 공사 준공

11-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

- 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

‣ 작성요령은 투융자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

11-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘13년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’12년까지 부담액	’13년 부담액	’14년 이후 부담 예정액
BTL	'05년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	푸른목포환경(주)	50,294	14,992	5,507	89,639	20년
BTL	'06년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	맑은목포환경(주)	65,935	6,517	7,048	127,404	20년
BTL	'09년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	청정목포환경(주)	32.301	-	646	62,712	20년

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 이후는 추정액

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유를 설명

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

- 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

‣ 작성요령은 투융자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘05년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수과 정승호(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 필요성 : 남해처리구역을 민간투자방식(BTL)사업으로 하수관거를 정비하여

침수피해 방지와 하수처리효율제고 및 쾌적한 도시환경조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. 6. 12. ~ 2010. 4. 11(46개월)

○ 사업위치 : 목포시 용당동, 연동, 산정동, 목원동, 동명동, 삼학동 일원

○ 민간사업자 : 푸른목포환경(주)

○ 총사업비 : 50,294백만원

○ 사업규모 : 하수관거 63.3㎞, 배수설비 3,204개소, 배수펌프장 1식,

유지관리모니터링시스템 1식

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 정부지급금(임대료+운영비) : 116,143백만원

- 기간 : 2010. 4. 12. ~ 2030. 4. 11(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	116,144	15,621	5,746	5,749	89,028
국 비	73,660	10,495	3,855	3,855	55,455
시 도 비
시군구비	42,484	5,126	1,891	1,894	33,573
기 타

□ 추진단계(운영중)

○운영기간 : 2010. 4. 12 ~ 2030. 4. 11(20년간)

□ 향후계획

○ 20년간 푸른목포환경(주)에서 유지관리

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	하수관거 67.4㎞, 배수설비 3,266개소, 배수펌프장 1식, 유지관리모니터링시스템 1식	하수관거 63.3㎞, 배수설비 3,204개소, 배수펌프장 1식, 유지관리모니터링시스템 1식
총사업비	52,291백만원	50,294백만원	감1,997 백만원

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘06년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수과 정승호(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 필요성 : 남해,북항처리구역을 민간투자방식(BTL)사업으로 하수관거를

정비하여 침수피해 방지와 하수처리효율제고 및 쾌적한 도시환경조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2008. 8. 22. ~ 2012. 1. 21(41개월)

○ 사업위치 : 목포시 용당동, 용해동, 연동, 산정동, 삼학동, 상동, 북항동 일원

○ 민간사업자 : 맑은목포환경(주)

○ 총사업비 : 65,935백만원

○ 사업규모 : 하수관거 49.8㎞, 배수설비 705개소, 용당우수저류조 1개소

유지관리모니터링시스템 1식

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 정부지급금(임대료+운영비) : 150,302백만원

- 기간 : 2012. 1. 22. ~ 2032. 1. 21(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	150,302	6,969	7,402	7,406	128,525
국 비	94,801	4,649	4,634	4,740	80,778
시 도 비
시군구비	55,501	2,320	2,768	2,666	47,747
기 타

□ 추진단계(운영중)

○운영기간 : 2012. 1. 22 ~ 2032. 1. 21(20년간)

□ 향후계획

○ 20년간 맑은목포환경(주)에서 유지관리

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	하수관거 50.3㎞, 배수설비 651개소, 우수저류조 2개소, 유지관리모니터링시스템 1식	하수관거 49.8㎞, 배수설비 705개소, 우수저류조 1개소, 유지관리모니터링시스템 1식
총사업비	66,089백만원	50,294백만원	감155 백만원

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘09년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수과 정승호(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 필요성 : 북항처리구역을 민간투자방식(BTL)사업으로 하수관거를 정비하여       침수피해 방지와 하수처리효율제고 및 쾌적한 도시환경조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 2. 16. ~ 2013. 10. 15(32개월)

○ 사업위치 : 목포시 북항동, 연산동, 원산동, 산정동 일원

○ 민간사업자 : 청정목포환경(주)

○ 총사업비 : 32,301백만원

○ 사업규모 : 하수관거 19.3㎞, 배수설비 1,039개소, 맨홀펌프장 2개소

유지관리모니터링시스템 1식

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 정부지급금(임대료+운영비) : 70,783백만원

- 기간 : 2013. 10. 16. ~ 2033. 10. 15(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	70,783		715	3,883	66,185
국 비	44,350		300	2,476	41,574
시 도 비
시군구비	26,433		415	1,407	24,611
기 타

□ 추진단계(운영중)

○운영기간 : 2013. 10. 16 ~ 2033. 10. 15(20년간)

□ 향후계획

○ 20년간 청정목포환경(주)에서 유지관리

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	하수관거 19.5㎞, 배수설비 1,072개소, 맨홀펌프장 2개소, 유지관리모니터링시스템 1식	하수관거 19.3㎞, 배수설비 1,039개소, 맨홀펌프장 2개소, 유지관리모니터링시스템 1식
총사업비	32,450백만원	32,301백만원	감149백만원